투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	업무지시 및 부진공정 만회 대책 제출 요청

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리본부에서 귀 공단에 위탁하여 공사감독 중인“성암로 병목구간 개선공사”에서 성산자동차학원앞 PC옹벽 상단부에 방호벽(1m)을 설치 예정으로 있으나 마포구에서 추진중인 성산자동차학원공원화 계획에 따르면 방호벽을 철거(폐기물 발생)하여야 하는 등 설치가 불필요할 것으로 판단되는바

3. 마포구와 공원화사업 시기 등을 협의하시어 철거가 쉽고 차량 추락사고도 예방할 수 있는 안전한 차량 방호용 울타리로 변경 설치를 검토해 주시고, 특히 가로등 주 위치 변경 등을 관련부서와 협의 후 실정보고 하여 주시기 바라며,

4. 현재 공사 중지된 가시설제거 및 배수공 설치공사 등을 조속 추진하여   공사기간내 사업이 완료 될수 있도록 부진 공정 만회대책을 수립하여 제출해 주시고,

5. 점용료를 최소화할 수 있도록 성산자동차학원내 공사를 위해 사용중인 부지를 조속 원상복구하여 주시고,

6. 아울러 태권종합건설(주)의 하도급사 체불로 인한 가압류 발생 및 국세 미납 등으로 민원이 발생되고 있으니 시공사에 민원을 조기 해결토록 조치하여 주시고 현재까지 실정보고하지 미 제출건이 있으면 금년 3.25.(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김동현		교량건설과장	이동훈		토목부장	03/18 노우성
협조자
시행	토목부-5475	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개