문서번호	임대주택과-13441
결재일자	2013.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	임대계획팀장	임대주택과장	주택건축정책관		주택정책실장
장문희	김장수	한병용	강맹훈		11/13 이건기
협 조
	택지개발팀장			조영국
	장기전세팀장			진경식
	임대사업팀장			김승수
	주거복지팀장			이원군

제47차 임대주택 8만호 공정회의 결과 보고

2013. 11.

주택정책실

임대주택과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □

제47차 임대주택 8만호 공정회의 결과 보고

Ⅰ				개 요

○ 일   시 : 2013. 11. 8.(금) 10:00 ~

○ 장   소 : 신청사 3층 공용회의실

○ 참 석 자

- 서울시 : 임대주택과장, 공급지원팀장, 임대계획팀장, 임대사업팀장장기전세팀장, 주거복지팀장 외 담당자

- SH공사 : 희망주택처장, 계획설계1처장, 계획설계2처장, 사업총괄팀장매입임대팀장, 재생기획팀장, 보상1팀장, 보상2팀장, 전세지원TF팀장 외 담당자

○ 회의내용

- 전차(46차) 공정회의 조치결과

- 회의내용 : 중점관리 사업장 추진현황 분석 및 대책 중점보고

【항동대체물량(10개소), 상계/신정4/오금지구, 천왕7, 천왕여성안심장기전세(등촌, 신내, 수유486-682, 수유721-1), 가양협동조합, 사당민간토지】

Ⅱ				회 의 결 과

□ SH공사 추진 현안 사업 추진계획 보고

○ 발산기숙사는 당초 목표기한내 완공해야함을 감안하여 입주날짜를 정확하게 확정하여 보고할 것

○ 가양동 협동조합형 임대주택시범사업은 당초 입주일정에 차질이 발생 시에는 지연사유(설계변경지연 사유 등) 및 대책을 공문제출할 것

⇒ 입주시기가 확정되어 시민과 약속한 사업에 대해서는 반드시 입주시기를 준수하기 바람

○ 입주민의 이사편의 등을 위해서 입주지연ㆍ단축 등 입주시기 조정에 대해서는 확정일자를 제시할 것

○ 시 건축기획과와 협의하여 다가구주택 사전매입 및 사회적기업 참여  검토할 것

○ 중점관리 사업장에 대한 개발계획변경과 관련 검토시 담당부서 팀장 참석토록 할 것

□ 기 타 사 항

○ 차기 회의시 비용, 예산, 우려사항 검토 등을 위하여 SH공사 재무관리 담당부서 회의참석 할 것

Ⅲ				행 정 사 항

○ 금회 공정회의 내용을 정리하여 조치하고 차기 회의 시 결과보고

○ 차기(48차) 공정회의 개요

- 일시(예정) : 2013. 11. 22.(금) 10시~ (※변경시 별도 통보예정)

- 장    소 : 신청사 3층 공용회의실

- 회의내용 : 중점관리 사업장 추진현황 분석 및 대책 중점보고

【항동대체물량(10개소), 상계/신정4/오금지구, 천왕7, 천왕여성안심장기전세(등촌, 신내, 수유486-682, 수유721-1), 가양협동조합, 사당민간토지】

붙임: 제47차 공정보고 ppt자료(대용량파일 별도) 1부.  끝.