문서번호	토목부-5629
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	광역도로과장	토목부장	시설국장
박상철	진재섭	노우성	03/19 형태경

구리암사대교 연결도로 건설공사

- 5차공사 시행계획 검토보고 -

2015. 3.

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

구리암사대교연결도로 건설공사

- 5차공사 시행계획 검토보고 -

2015년도 공사 예산 배정에 따라 구리암사대교 연결도로 건설공사 5차공사 시행 계획을 검토 보고드림

※ 15년 배정예산 6,394백만원 (토목 4,544 ․ 보상비 1,850)

◼ 사업개요

〇 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

〇 위    치 : 강동구 암사동 암사IC ~ 강동구 고덕동 훈련원사거리

〇 규    모 : 폭 29.5~31.5m (6차로), 연장 L=1.88km

〇 총사업비 : 75,335백만원

- 공사비 22,613   감리비 300  보상비 52,422

※ 분야별 공사비 : 토목 21,703(도급액 : 18,242)  문화재 시발굴 910

〇 공사비 집행현황(계획)

(단위 : 백만원)

구 분	총괄	1~3차 (준공)	4차 (진행중)	5차	장래
계약금액	18,242	11,326	3,983	2,933	-
공 정 율	100.0%	62.1%	21.8%	16.1%	-
공사기간	2012.8.2~ 2015.6.30	2012.8.2~ 2015.2.20	2014.7.10~ 2015.6.30	착수일~ 2015.6.30	-

〇 시공사 / 감리사 : (주)신성건설 외2개사 / (주)도화엔지니어링 외1개사

◼ 추진경위

〇 ‘12. 7.27. : 공사 계약

〇 ‘12. 8. 2. : 공사 착공

〇 ‘12. 8. ~ ’14.11. : 구리암사대교 연결도로 공사 및 개통

〇 ‘14. 2. ~ : 보도 및 자전거도로 공사

가로수 식재 공사, 사면보강공사 등

◼ 5차공사 시행 계획

고덕교 및 고덕보도교(1교, 2교), 아리수길 접합구간(강일삼거리) 중점시공

〇 공사기간 : 착공일 ~ 2015. 6.30.

〇 공사분야 : 토목

〇 도급금액 : 2,933백만원(관급자재 305백만원 별도)

〇 예산과목 : (광역교통시설특별회계)도시안전본부 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 사가정~암사동간 도로건설, 시설비및부대비, 시설비.

〇 주요공종

- 고덕교 확장 (L=40m, B=20m(보도포함)→21.2m(차도))

- 고덕 보도육교 (1교 L=56m B=4m, 2교 L=58m  B=4m)

- 아리수길 접속부 도로 확장(강일삼거리)

◼ 조치의견

〇 상기 5차공사 시행방안 검토결과 적정한 것으로 사료되므로 계약부서에 붙임     설계서와 같이 계약의뢰 하여 공사 시행코자 함.

붙임 : 1. 5차공사 설계현황 1부.

: 2. 5차공사 설계서 및 예정공정표  1부.  끝.