문서번호	토목부-5563
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
정문수		이승우	전결 03/19 노우성
협조
	주무관		신복민

실시설계 부족예산 확보계획 보고

(올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설(2단계) 실시설계)

2015. 3.

서울특별시도시기반시설본부

(토 목 부)

실시설계 부족예산 확보계획 보고

(올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설(2단계) 실시설계)

실시설계 용역비 검토결과 예산이 부족하여 주관부서(도로계획과)와

협의하여 예산을 추가 확보하고자 보고 드림.

※ ′15년 실시설계 용역비 : 300백만원 → 700백만원 (부족400백만원)

사업개요

○ 사 업 명 : 올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설(2단계)

○ 사업위치 : 잠실나루역 연결교차로 ~ 아산병원길

○ 사업규모 : 도로개설 폭2차로, 연장710m (교량 135m 포함)

○ 사업기간 : 2015. 4. ~ 2018.12.

○ 사 업 비 : 15,000백만원 (′15년 예산 : 1,000백만원)

사업추진 현황

○  '08.10 ~’09.01. : 타당성조사 및 기본계획용역(송파구청)

○  '09.02.23. : 투자심사 (조건부)

○  '10.06.22. : 건축위원회 심의(조건부 동의)

○  '09.07.08. : 기본설계 용역 착수

○  '10.10.29. : 기본설계 용역 완료

연도별 예산집행 계획

(단위:백만원)

구 분	계	기 투 자	2015년	2016년이후	비 고
계	15,000	-	1,000	14,000
설 계 비	300	-	300	-
공 사 비	13,500	-	650	12,850
감 리 비	1,200	-	50	1,150

보고내용

○ 올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설(2단계) 실시설계용역을 발주하기 위해 설계비 검토 결과 당초 확보된 예산(300백만원)으로는 용역 발주가 어려워 추가 예산 확보가 필요한 실정임.

- 설계용역비 산출

(단위 : 백만원)

구 분	실비정액가산 방식	공사비요율 방식	비 고
실시설계비	480 (직접인건비+제경비+기술료)	450	′15년 예산 : 300백만원
조 사 비	80	80
기타경비	170	170
용 역 비	730	700	부족 예산 400백만원
검토의견	실시설계 용역비에 대한 예산 절감을 위하여 “공사비요율에 의한 방식”에 의한 용역비 적용
적 용 안		○

조치계획

○ 상기와 같이 실시설계 용역비를 비교한 결과 공사비요율 방식으로 실시설계용역비를 산출 적용하고자 하며,

○ 실시설계 용역 발주를 위한 부족예산(400백만원)에 대하여는 주관부서(도로계획과)에 추가 예산 확보를 요청하고자 함.

- 예산 현황

(단위:백만원)

구 분	′15년 예산	소 요 예 산	부족예산	비 고
실시설계 용역비	300	700	400

향후계획

○ ′15. 3. : 기술용역 타당성 심사 및 용역발주 심의 요청

○ ′15. 4. : 실시설계용역 발주

○ ′15.12. : 실시설계 완료.  끝.