2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청(서울형 사방시설 설계 및 시공기준 학술용역)

재무과-25671(2014.06.02.)호로 계약체결 통보되어 우리부서에서 시행중인「서울형 사방시설 설계 및 시공기준 학술용역」에 대한 준공기한 연기를 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 서울형 사방시설 설계 및 시공기준 학술용역

- 용역기간 : 2014.05.30. ∼ 2015.03.25.

- 용 역 비 : 140,000천원

- 용역기간 : 2014.05.30. ∼ 2015.03.25.

- 계 약 자 : (재)서울연구원

나. 변경내용 : 준공기한 66일 연장

- 준공기한 : 당초 2015.03.25. ⇒ 변경 2015.05.30.

다. 지체상금 : 미부과

붙 임 : 1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.   끝.

	산지방재과장
주무관	안규홍		사면관리팀장	윤봉섭		산지방재과장	03/19 김영수
협조자
시행	산지방재과-2943	(		)	접수		(		)
우	100-772	서울 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩 8층	/
전화	02-2133-2181	/전송	02-2133-1084	/	workyes@seoul.go.kr	/	대시민공개