문서번호	산지방재과-2929
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	사면관리팀장	산지방재과장		푸른도시국장
안규홍	윤봉섭	김영수		03/19 오해영
협 조

『서울형 사방시설 설계 및 시공기준 학술용역』

준공기한 연기 검토 보고

2015. 3.

푸른도시국

(산재방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『서울형 사방시설 설계 및 시공기준 학술용역』

준공기한 연기 검토 보고

서울형 사방시설 설계 및 시공기준 학술용역 추진 관련 2015. 3월 사방기술교본이 개정 출판됨에 따라 기준 검토에 소요되는 기간을 반영하여 준공기한을 연기하고자 함

용역개요

○ 용 역 명 : 서울형 사방시설 설계 및 시공기준 학술용역

○ 계 약 자 : 서울연구원

○ 계약금액 : 금140,000천원(금일억사천만원)

○ 계약기간 : 2014.05.30. ~ 2015.03.25.

○ 과업내용

- 서울 산지 지형 및 지반특성에 적합한 설계 및 시공기준 제정

- 서울형 사방사업 품셈 연구

- 기존 설치된 사방시설의 적정성 평가

기한연기 : 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 합니다.

○ 준공기한 연기 : 66일

- 당초 : 2015.03.25. ⇒ 변경 : 2015.05.30.

○ 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유 : 사방기술교본 개정(2015.3월)과 관련 사방시설 개정 설계기준 검토에 따른 소요 용역기간 반영

행정사항

○ 용역 계약자와 계약기간 변경 합의각서 작성

○ 재무과에 준공기한 연기 의뢰, 조직담당관에 준공기한 연기 통보

○ 변경 준공기한내 용역이 완료되도록 관리

붙 임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.   끝.