문서번호	마곡조성담당관-8880
결재일자	2013.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목계획팀장	마곡조성담당관		마곡사업추진단장
이기원	서귀동	하종현		11/19 서노원
협 조

단지조성 공정점검(15차) 회의 결과보고

2013. 11

마곡사업추진단

(마곡조성담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 ■ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □

단지조성 공정점검(15차) 회의 결과보고

Ⅰ		점검개요

일   시 : ′13. 11. 15(금) 14:00

장   소 :  마곡 1공구 현장사무실

참 석 자 : 마곡조성담당관 (토목계획팀장, 담당)

SH공사 (토목조경팀 담당)

현장소장, 현장감리단장 (1▪2공구, 빗물펌프장, u-City)

안   건 : 단지조성 공정 진행상황 점검 및 추진대책

〔공정현황〕

○ 단지조성공사 : 공정률 55.1% ('13. 11.15 현재)

- 간선하수박스   : 1,115m중  1,075m 완료 (96.4%)

- 공동구(1공구)   : 1,158m중    985m 완료 (85.0%)

(2공구)  : 1,506m중  1,352m 완료 (89.8%)

○ 신설 빗물펌프장 : 공정률 25.3%

- 펌프장 구조물 : 2펌프장 중간슬래브 레미콘타설, BTR 강관추진

○ 유비쿼터스도시건설공사(U-CITY) : 공정률 7.5%

- 1지구 정보통신인프라 관로공사 진행

Ⅱ		점검결과 및 조치

5호선 마곡역 공항로 횡단통로 설치관련, 설계·공사시행 추진공정 등 도시철도공사 관련부서와 협의를 철저히 하여, 공항로 구조개선 공사와 5호선 마곡역 출입구 설치공사가 연계되어 원활하게 추진될 수 있도록 조치

- 공항로 하부 KT 통신관로 설치일정(‘13.12.10 완료예정) 및 입주시기 등 제반여건을 고려하여 추진공정 협의하여 공정간 충돌 및 이중투입 등 낭비사례가 발생하지 않도록 협의 철저

가시설 및 구조물 설치 등을 위한 굴착공사 진행시 추락/붕괴사고 등 안전사고 발생이 없도록 사전점검 및 현장 안전 관리 철저

- 굴착공사장 주변 통행인들의 안전사고 발생이 없도록 작업장 주변에 대한  수시점검 및 안전사고 사전 예방조치 철저

SH공사 마곡사업처 담당팀별로 진행중인 마곡광장, 중앙공원, 마곡나루역, 공항철도역사 등 사이에 설치되는 도로는 공사비용 이중투입 등 낭비사례가 발생하지 않도록 SH공사 팀간 사업추진계획 협의 철저 시행

유비쿼터스도시건설공사 관련 단지조성 기반시설 공사와 연계되어 추진될 수 있도록 긴밀한 협의체계를 유지하고, 가로등·교통신호등과 같은 지주시설물의 통합지주화 방안도 지속적으로 검토