문서번호	설비부-3369
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
배수웅		김영수	03/20 박기형
협조

『서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로 설치 전기공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 보고

2015.  3.

설  비  부

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 보고

서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로 설치 전기공사와 관련, 물가변동으로 인한 계약금액 조정요청이 있어 이에 대한 검토 보고임.

관련근거

○ 감리단 실정 보고 : 서남권(감) 2015-87호(2015.03.16.)

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 같은법 시행령 제73조, 같은법 시행규칙 제72조

사업개요

○ 공 사 명 : 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로 설치 전기공사

○ 공사규모

- 고척지하차도 조명등 392등 및 배전설비 1식

- 보행광장 조명등 129등 및 부대시설 1식

○ 공사기간 : ’13. 5. 31 ~ ’15. 6. 30

○ 시 공 사 : 유신전기건설㈜

○ 감 리 사 : ㈜무림설계기술단

○ 도 급 비 : 1,042,178,720원

물가변동 조정 적용금액 적정성 검토

○ 조정요건 충족 여부

구 분	기준시점	비교시점	경과일수	지수조정율(%)	검토결과
1회	2013.4.30	2014.1.1	218일	3.77	요건충족

※ 충족 요건 : 계약일로부터 90일이 경과되고 지수조정률이 100분의 3이상 증가

○ 물가변동 조정 적용금액

순번	구 분	금 액	비 고
1	도급계약금액 (B)	1,042,178,720원
2	물가변동 적용제외 금액 (C)	0원	진행공정 0%
3	물가변동적용대가 (D)	1,042,178,720원	D = B - C
4	물가변동 조정율 (A)	3.77%
5	물가변동 등락금액 (E)	39,290,000원	E = A × D
6	선금급 금액	-
7	선금급 공제금액 (F)	-
8	물가변동 조정 적용금액 (G)	39,290,000원	G = E - F

※ 조정기준일 당시(2014.01.01.) 토목공사 지연으로 전기공사 공정율 0%

○ 공사비 조정 내용                                    (단위:원)

구 분	계약금액(총차)	물가변동 증액(1회)	조정 계약금액	비 고
도급비	1,042,178,720	39,290,000	1,081,468,720

○ 감리원 검토의견

- 물가변동에 따른 지수조정 검토결과 적용 기준일로부터 90일 이상 경과, 지수조정율 100분의 3이상 증가되어 물가변동으로 인한 계약금액 조정이 타당함.

조치의견

○ 본 공사의 물가변동으로 인한 계약금액 조정은 관련규정에 따른 조정요건 및 조정금액 산출이 적정한 것으로 사료됨.

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정건에 대하여 감리단에 승인 통보하고 추후 설계변경시 본 계약금액 조정건을 포함하여 반영 조치하고자 함.  끝.