투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	SH공사사장(택지조성팀장)
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사 공사기한연장 승인(마천지구 국민임대주택조성공사-안전표지)

1. 서울특별시SH공사 택지조성팀-1587호(2015.03.18.)와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 시행하고 있는「마천지구 국민임대주택조성공사 관련 교통안전시설(안전표지) 원인자부담공사」의 공사(준공)기한 연장승인요청에 대하여 아래와 같이 연장승인하오니, 교통안전표지 인계·인수전까지 발생되는 제반사항(고장 및 파손 등)에 대한 보수 및 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 마천지구 국민임대주택조성공사 관련 교통안전시설(안전표지) 원인자부담공사

나. 공사장소 : 송파구 마천동 200-1 일원

다. 공사내용 : 교통안전표지 신설 및 철거,교체

라. 승인내용 : 공사(준공)기한 연장

- 연장사유 : 기타공정 지연

- 당 초 : 2012.08.10 ~ 2014.12.31

- 변 경 : 2012.08.10 ~ 2015.12.31.

붙 임 : 원인자준수사항 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김동현		기전과장	03/20 代김현기
협조자
시행	기전과-2325	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0362	/전송	02-2040-0365	/		/	대시민공개