문서번호	교통운영과-5398
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
최기문		최정규	03/20 강진동
협조

교통안전시설 설치공사 건설사업관리 용 역 착 수 보 고

2015. 3

교통안전시설 설치공사 건설사업관리 용역 착수보고

‘15년도 교통안전시설(노면표시, 안전표지, 표지병) 설치공사 건설사업관리 용역관련 착수보고서 검토 및 향후 추진계획에 대한 보고임.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 교통안전시설 설치공사 건설사업관리 용역(강북, 강남)

❍ 용역범위

- 강북(17지역) : 3개 도로사업소, 14개 자치구

- 강남(14지역) : 3개 도로사업소, 11개 자치구

❍ 용역내용 : 교통안전시설물(노면표시, 안전표시, 표지병) 설치공사 건설사업관리

□ 용역계약 현황

구 분	교통안전시설 설치공사 건설사업관리 용역		비고
	강북지역	강남지역
계약업체	㈜영호이앤씨 대표 정숙영	㈜트래픽스 대표 김희수
계약금액	123,077천원	124,864천원
계약일자	‘15년 3월 12일	‘15년 3월 13일
착공일자	‘15년 3월 13일	‘15년 3월 13일
준공기한	‘15년 12월 31일	‘15년 12월 31일

□ 착수보고서 주요 검토내용

❍ 강북지역

가. 투입 건설사업 관리원에 대한 검토결과

연번	성 명	건설사업 관리원 적정성		검토의견	비 고
		심사조건	심사결과
1	유광재	교통 또는 토목분야의 학력, 경험 등 자격을 갖춘 중급기술자	한국엔지니어링협회 기술자수첩 사본제출 (교통분야 중급기술자)	적 정	현장대리인
2	문장우	교통 또는 토목분야의 학력, 경험 등 자격을 갖춘 초급기술자	한국엔지니어링협회 기술자수첩 사본제출 (교통분야 초급기술자)	적 정
3	이정민	교통 또는 토목분야의 학력, 경험 등 자격을 갖춘 초급기술자	한국엔지니어링협회 기술자수첩 사본제출 (교통분야 초급기술자)	적 정
4	김남철	교통 또는 토목분야의 학력, 경험 등 자격을 갖춘 초급기술자	한국엔지니어링협회 기술자수첩 사본제출 (교통분야 초급기술자)	적 정

나. 장비 및 차량확보 현황 : 적정

- 재귀반사성능 측정기(노면표시) : StripeMaster1(제조사:옵티콘)

- 재귀반사성능 측정기(안전표지) : NeoLight PR1000(제조사:파이맥스)

- 차    량 : 35조2091, 35조 2092(차량등록증 제출)

다. 감리용역 예정 공정표 및 참여기술자 배치

업체명	공정율 (%)	공 정
		2015년
		3월	4월	5월		6월	7월	8월	9월	10월	11월		12월
㈜영호이앤씨	20
	30
	35
	15

- 유광재 : 강북권역 각 도로관리사업소 및 구청 업무 총괄

- 이정민 : 서부사업소, 은평구, 마포구, 서대문구, 용산구, 중구

- 신두하 : 성동사업소, 종로구, 강북구, 성북구, 도봉구, 노원구

- 김남철 : 북부사업소, 성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구

❍ 강남지역

가. 투입 건설사업 관리원에 대한 검토결과

연번	성 명	건설사업 관리원 적정성		검토의견	비 고
		심사조건	심사결과
1	임한빈	교통 또는 토목분야의 학력, 경험 등 자격을 갖춘 중급기술자	한국엔지니어링협회 기술자수첩 사본제출 (교통분야 중급기술자)	적 정	현장대리인
2	김상환	교통 또는 토목분야의 학력, 경험 등 자격을 갖춘 초급기술자	한국엔지니어링협회 기술자수첩 사본제출 (교통분야 초급기술자)	적 정
3	홍사훈	교통 또는 토목분야의 학력, 경험 등 자격을 갖춘 초급기술자	한국엔지니어링협회 기술자수첩 사본제출 (교통분야 초급기술자)	적 정
4	박영권	교통 또는 토목분야의 학력, 경험 등 자격을 갖춘 초급기술자	한국엔지니어링협회 기술자수첩 사본제출 (교통분야 초급기술자)	적 정

나. 장비 및 차량확보 현황 : 적정

- 재귀반사성능 측정기(노면표지) : StripeMasterⅡ, Model 75000-2

- 재귀반사성능 측정기(안전표지) : NeoLight PR1000(제조사:파이맥스)

- 차    량 : 56조 3256, 62조 9867(차량등록증 제출)

다. 건설사업관리 용역 예정공정표 및 참여기술자 배치

업체명	공정율 (%)	공 정
		2015년
		3월	4월	5월		6월	7월	8월	9월	10월	11월		12월
㈜트래픽스	20
	30
	35
	15

- 임한빈 : 강남권역 각 도로관리사업소 및 구청 업무 총괄

- 박영권 : 남부사업소, 동작구, 관악구, 금천구

- 홍사훈 : 동부사업소, 강동구, 송파구, 강남구, 서초구

- 김상환 : 강서사업소, 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구

□ 검토 및 조치계획

❍ “교통안전시설 설치공사 건설사업관리 용역(강북, 강남)” 착수보고서 검토결과 건설사업관리원 조직․자격 및 장비(재귀반사성능 측정기)보유현황 등은 적정함.

❍ 3월은 노면표시설치 공사업체 선정 중에 있어, 우선 건설사업관리원을 “14년 하반기 시공한 본공사 재귀반사성능값(6개월후 1주일이내) 측정”에 작업하고자함.

❍ 2015년도 건설사업관리업무 역량강화를 위하여 감리원(8명)의 현장 투입전 시방서 기준 등 교육실시

- 교육일시 : '15. 3. 16(월)

- 교육내용 : 별 첨

※ 추진현황 및 추진계획

❍ ‘15. 3. 16  : 교통안전시설 설치공사 건설사업관리원 교육.

❍ ‘15. 3. 17  : 건설사업관리 용역 계약체결 안내(사업소 및 자치구)

❍ ‘15. 3월말까지 : 15년 교통안전시설물 발주현황 점검(사업소 및 자치구)

및 14년 하반기 시공 재귀반사성능값 측정

❍ ‘15. 4월 ~ : 15년도 교통안전시설물 본 공사현장 재귀반사성능값 측정 등   점검(사업소 및 자치구)

따로붙임 : 교통안전시설 설치공사 건설사업관리원 교육자료 1부.  끝.