문서번호	도시철도설비부-2882
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		차량과장	도시철도설비부장
안봉용		황영일	03/20 정찬웅
협조

9호선 차량 구매기간 단축을 위한

조달청 협의결과 보고

2015. 3.

도시철도설비부

9호선 차량 구매기간 단축을 위한

조달청 협의 결과 보고

9호선 혼잡도 조기개선을 위한 차량 구매를 추진함에 있어 공고기간 단축을   위해 조달청 관련부서와  협의하고, 그 결과를 보고함.

□ 출장개요

○ 출장일시 : 2015. 3. 12(목)

○ 출장장소 : 대전시(조달청 자재장비과)

- 자재장비과장 외 2명

○ 출 장 자 : 차량과장, 안봉용

○ 출장목적 : 9호선 차량 구매와 관련 공고기간 단축

□ 협의내용

○ 공고기간(40일)은 단축하기 곤란 함.

- 공고기간(40일) 단축 시 외국업체의 이의 제기 시 오히려 공고기간 추가 연장 우려

○ 공고기간(40일)을 제외한 절차는 최대한 단축 가능 함.

- 사전규격공고 및 계약 체결기간 등은 최단기간으로 실행

□ 추진사항

○ `15.3.13 : 조달구매 의뢰 및 사전규격공개 등록

- 조달청 나라장터→3.19일한 공고

□ 향후계획

○ `15. 3. 20~04. 29 : 1차 공고(40일간)

○ `15. 4. 30~05.06 : 입찰제안서 평가위원회 구성·평가 및 개찰

○ `15. 05. 07~05.15 : 계약 체결

첨부 : 향후 추진일정 및 소요일수  ( 정상추진 및 이의신청 등 접수 시).  끝.

-9호선 전동차 70량 구매-

추진일정 및 소요일수

(정상 추진)

NO	구 분	추진일정	추진부서	소요 일수	비 고
1	차량 구매의뢰	3.12	서울시 (도철설비부)	1일
2	사전규격공고	3.13 ~ 3.19	조달청 (자재장비과)	7일	마감일시 : 3.19(23:59)
3	입찰공고	3.20 ~ 4.29	조달청 (자재장비과)	40일
4	개 찰	4. 30	조달청 (자재장비과)	1일
5	제안서 평가	5.01 ~ 5.03	서울시 (도철설비부)	3일	입찰제안서 평가 위원회 구성
6	입찰제안서 평가 결과 통보	5.04	서울시 (도철설비부)	1일
7	가격개찰	5.06	조달청 (자재장비과)	3일
8	계약 체결	5.06 ~ 5.15	조달청 (자재장비과)	1일	계약 체결기간 10일

-9호선 전동차 70량 구매-

추진일정 및 소요일수

(사전규격공개 이의신청 및  유찰 시 )

NO	구 분	추진일정	관련기관	소요 일수	비 고
1	차량 구매 의뢰	3.12	서울시 (도철설비부)	1일
2	사전규격공고(진행중)	3.13 ~ 3.19	조달청 (자재장비과)	7일	마감일시: 3.19 (23:59)
3	사전규격-업무협의	3. 20 ~ 3. 26	조달청 -서울시	7일	사전규격공고 이의신청 시
4	사전규격-재공고	3.27 ~ 4.02	조달청 (자재장비과)	7일
7	입찰 공고	4.03 ~ 5.13	조달청 (자재장비과)	40일	공고기간 40일
8	개 찰	5. 13	조달청 (자재장비과)	1일
8-1	2차 공고(유찰 시)	5.13 ~ 5.22	조달청 (자재장비과)	10일	공고기간 10일
8-2	개 찰	5.23	조달청 (자재장비과)	1일
9	제안서 평가	5.26 ~ 4.28	서울시 (도철설비부)	3일	입찰제안서 평가 위원회 구성
10	입찰제안서 평가 결과 통보	5.29	서울시 (도철설비부)	1일
11	가격개찰/예산협의/시담	6.01 ~ 6.12	조달청 (자재장비과)	10일
12	계약 체결	6.12 ~ 6.21	조달청 (자재장비과)	10일	계약 체결기간 10일