문서번호	조경과-6364
결재일자	2013.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
김기배	홍성실	이성주	양현모		11/26 안영노
협 조
	총무과장			이경로
	시설과장			배병렬

『서울대공원 유인원관 옥상녹화 사업』

겨울철 공사중지 계획

2013. 11.

서울대공원

(조 경 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 ■	(	푸드뱅크(서울특별시 사회복지협의회)	)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『서울대공원 유인원관 옥상녹화사업』

겨울철 공사중지 계획

『유인원관 옥상녹화사업』을 추진함에 있어 동절기로 인한 방수공사 등 적정 시공에 어려움이 있어 동절기 시공을 중지하고자 보고 드림.

Ⅰ				사 업 개 요

○ 위    치 : 서울대공원 유인원관 옥상

○ 사업기간 : 2013. 11. 11 ~ 12. 18.(45일)

○ 사업규모 : 1,158㎡

○ 사업내용

- 방수공사   : 바탕처리 255㎡ 등 5공종

- 시설물공사 : 진입계단 1개소, 데크 2개소, 파고라 1개소 설치 등 18공종

- 식재기반공사 : 인공화산석 393.3㎡포설 등 5공종

- 식재공사 : 수  목 - 사철나무 등 6종 1,254주

초화류 - 구절초 등 26종 25,310본, 잔디 15.2㎡

- 설비공사 : 관부설 및 접합 38개소, 스프링클러 54셋트 등 17공종

○ 도급금액 : 232,330천원

○ 도 급 자 : ㈜삼림엘엔씨 대표 오지순

Ⅱ				추 진 경 과

○ 2013. 10.  2 : 실시설계 용역 준공

○ 2013. 10. 14 : 공사발주

○ 2013. 11.  4 : 공사계약 (2013. 11. 7 공사착공)

○ 2013. 11. 21 : 동절기 공사 시공중지 요청 [(주)삼림엘엔씨 → 서울대공원]

◀ 계약자 요청내용 - (삼림 제2013-109호) ▶

동절기 방수공사 시공시 하자 우려 및 초화류 식재시 동해피해

우려가 있어 공사 시공중지 요청

Ⅲ				검 토 의 견

○ 공사착공 이후 11.22현재까지 동절기 저온으로 인하여 옥상녹화사업의 선행공종인 방수공사의 착수가 지연되고 있는 상태로,

○ 향후 기온이 더 내려가 방수 등 공사시행시 품질저하의 원인이 될 것이므로 겨울철 공사를 중단하고 해동 이후에 공사착공 하고자 함.

Ⅳ				조 치 계 획

○ 겨울철 공사중단 지시 및 공기연장 등 후속조치 이행

붙임 : 공사중지 요청 공문 사본 1부.  끝.