	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	강동소방서 사무공간 재배치 등 설계용역 지체상금 처리계획

1. 관련근거

가. 소방행정과-2910(2015.2.17.)호“강동소방서 사무공간 재배치 등 설계용역 계약이행지체 및 향후처리 계획 보고”

나. 소방행정과-3310(2015.3.19.)호“설계용역 완수 검사조서”

2. 강동소방서 사무공간 재배치 등 설계용역 기한내에 이루어지지 않아 지연일에 대하여 다음과 같이 지체 상금을 부과하고자 합니다.

- 아  래 -

가. 건   명 : 강동소방서 사무공간 재배치 등 설계용역 지체상금 부과

나. 지체일수 산정내역

○ 용역기한 : 2015. 2. 17. ~ 3. 9.

○ 준공일자 : 2015. 3. 19.

○ 검수일자 : 2015. 3. 19.

○ 지체일수 : 9일 (준공기한 초과시 검수일까지 지체상금 부과)

다. 지체상금부과액

○ 계약금액 : 금5,500,000원

○ 지체상금율 : 2.5/1,000 (1일 13,750원)

○ 지체상금액 : 금123,750원(금 일십이만삼천칠백오십원정)

○ 산출내역 : 금13,750원 × 9일 = 123,750원

라. 납부자 : 산성건축사사무소 (대표 정재학)

마. 처리방법 : 서울시 세외수입 위약금으로 처리

바. 납부방법 : 설계용역 준공금 지급시 지체상금액 서울시 세입부과징수 등재후 세입전용 계좌 입금처리

사. 세입과목 : 경상적세외수입/잡수입/위약금.

붙임  설계용역 완수검사(감독) 조서 1부.  끝.

담당자	김기범		장비회계팀장	이은규		소방행정과장	손문종		소방서장	03/23 이영우
협조자
시행	소방행정과-3413	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동 성내로39(성내동 541번지)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02)473-1233	/전송	02)483-1190	/	kkb5630@seoul.go.kr	/	대시민공개