문서번호	행정관리과-2330
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	구의아리수정수센터소장
김점철		정남기	03/23 권오식
협조

공무직 청소근로자

휴게실 설치공사 추진계획

2015. 3

구의아리수정수센터

(행정관리과)

공무직 청소근로자

휴게실 설치공사 추진계획

문화재 제2공장 유휴 공간에 청소근로자 휴식공간, 샤워장 설치 등 근로환경시설 개선 공사를 하여 쾌적한 근무환경을 조성코자함

□ 추진근거 및 경위

○ 노동정책과-3136(2014.4.7.)호와 관련 청소근로환경시설 가이드라인 제정

○ ‘15년도 청소근로환경시설 개선 포괄사업비 배정(노동정책과-311호(2015.1.12.)

□ 공사 개요

□ 휴게실

○ 장소 : 문화재1층 유휴공간

○ 면적 : 여휴게실(35㎡), 남휴게실(27㎡)

○ 구성 : 휴식공간, 샤워실 및 부대시설 설치

□ 샤워실

○ 장소 : 남자 문화재 1층 유휴공간, 여자 문화재 2층 유휴공간

○ 면적 : 남 샤워실(10㎡), 여 샤워실(22㎡)

□ 집기구매

○ 세탁기 2대

○ 주방씽크대 1조(여휴게실)

□ 공사 내용

□ 조적공사

○ 여자 샤워실

- 기존 샌드위치 판넬면(2개면)조적후 샤워기 설치

- 기존 창문(3개소)조적후 샤워기 설치

○ 남자 샤워실

- 2개면 조적후 샤워기 설치

□ 타일공사

○ 남녀 샤워실 : 벽 및 바닥

□ 미장 및 방수공사

○ 방수공사 : 샤워실 바닥

○ 미장공사 : 샤워실 바닥 및 벽

□ 천정 공사

○ 남녀 샤워실 천정 : SMC 천정재 마감(m-bar)

○ 여자 탈의실 천정 : 아미텍스 천정재 마감(m-bar)

□ 수장 공사

○ 장판깔기 : 남녀 휴게실

○ 전기장판 : 남녀 휴게실 , 남자 탈의실

○ 여자 탈의실 벽면 석고보드 마감

○ 관물대설치(전면거울포함) : 남녀 탈의실

○ 칸막이벽 설치 : 남녀 휴게실(SGP) 칸막이벽

○ 도색 : 남자 탈의실 석고보드 마감면(상부 백색/하부 회색)

□ 창호 공사

○ 강화유리문 설치 : 여자 샤워실 출입문(2100*900)1개소

○ 방화문 설치 : 여자 탈의실(2100*1800)1개소

□ 목재 공사

○ 여자 휴게실 침상 설치(5000*5000)

○ 남자 휴게실 침상 설치(5300*3000)

□ 설비 공사

○ 전기온수기 설치

- 여샤워실(저탕량 300L)

- 남샤워실(저탕량 100L)

○ 배관공사

- 스텐 25mm(50m)

- 스텐 13mm(18m)

○ 샤워수전 : 여8개소, 남2개소

○ 혼합수전 : 2개소(남1, 여1)

○ 하수배관 : PVC 65mm(10m)

□ 전기 공사

○ 형광등기구 : 여 탈의실 4개소 설치

○ 삼파장 백열등기구 : 여샤워실 6개소, 남샤워실3개소

○ 벽콘센트 설치 : 여탈의실 4개소, 남녀휴게실 6개소

□ 기타

○ 해체 및 철거공사 : 1식  ○ 폐기물 처리비용 : 1식

□ 발주 및 예산

□ 추진일정

○ 공사설계 : 2015.3.25

○ 공사발주 : 2015.4월초

○ 공사시작 : 2015.4월 중순

○ 공사완료 : 5015.5월초

○ 공사입찰방법 : 제한경쟁(지역제한)

□ 소요예산 : 38,000천원

□ 효과

○ 청소 근로자 휴게실 설치 공사로 쾌적한 근무 환경으로 개선하여 후생복지향상에 기여.  끝.