문서번호	조경과-1524
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장
오맹렬	강금완	03/23 이성주
협 조

양묘장 먹이숲텃밭 노후 관정 및 부대시설 정비 계획

2015. 3.

조 경 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

양묘장 먹이숲텃밭 노후 관정 및 부대시설 정비공사 계획

양묘장 내 이노후화로 사용이 중지된 기존 관정시설 및 부대시설을 보수 정비하여 먹이숲 텃밭 운영에 만전을 기하고자 함.

※ 추진근거 : 2015년 노후 조경시설 정비공사(조경과-495, 2015.1.30.)와 관렴임

Ⅰ				양묘장 관정시설 현황

❍ 위   치  : 양묘장 내 텃밭(과천시 막계동 산136-4)

❍ 설치년도 : 1998.7.7

❍ 설비내역 : 수중펌프 3HP, 관정깊이 100m

Ⅱ				사업개요

❍ 기    간 : 2015. 3. ~ 4. 20

❍ 위    치 : 과천시 막계동 산136-4번지 일대

❍ 사업내용

- 지하수 노후 관정시설 보수 및 부대시설 정비 1식

- 전기인입공사(지하수관정) 1식

❍ 소요예산 : 24,000천원(관정보수 10,000천원, 전기인입 14,000천원)

※ 공사발주는 관련 법령에 따라 분리 발주 계약

Ⅲ				세부 추진계획

❍ 지하수관정보수정비공사 : 수의계약(소액)

- 공사비 : 10,000천원

- 대 상  : 지하수법 제22조에 의한 지하수개발․이용시공업 및 동법 제27조에 의한 지하수영향조사기관으로 등록을 필한 지하수관정개발 전문업체와 수의계약

- 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령 제25조

❍ 전기인입(관정)공사 : 수의계약(소액)

- 공 사 비 : 14,000천원

- 대   상  : 전기공사업법 제4조에 의거 공사업을 등록한 업체로서 시공경험이 풍부한 전문업체와 수의계약

- 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령 제25조

Ⅳ				추진일정

❍ 2014.02~03 : 실시설계(자체)

❍ 2014.03.24 : 공사발주

❍ 2014.04.20 : 공사준공

Ⅴ				기대효과

❍ 먹이숲 텃밭 원활한 용수공급으로 양질의 농작물 생산에 기여

❍ 미간분양 텃밭 운영에 따른 기반시설 부족 민원 해소

붙 임 : 2015. 노후 조경시설 정비 방침서 1부.  끝.