문서번호	생태공원과-2712
결재일자	2013.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생태공원과장	공원부장		한강사업본부장
서은교	이해룡	代박근대		11/29 한국영
협 조
	총무과장		김영기
	기획예산과장		이사형
	주무관		이옥상
	주무관		양순옥

『양화 한강공원 친수공간 조성사업』

발주계획 검토보고

2013. 11.

한강사업본부

(생태공원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	서울지방국토관리청	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『양화 한강공원 친수공간 조성사업』

발 주 계 획  검 토 보 고

우리본부에서 추진하고 있는 『양화 한강공원 친수공간 조성사업』에 대한 설계가 완료되어 공사 발주방법 등을 검토, 아래와 같이 계획을 수립하여 사업시행에 만전을 기하고자 함

사업개요

위    치 : 영등포구 양화 한강공원(성산대교 남단 상류)

사업기간 : 2013.12. ~ 2014.12.

총사업비 : 5,500백만원(13년 3,500백만원, 14년 2,000백만원)

규    모 : 면적 28,000㎡, 연장 0.27㎞

사업내용

- 물놀이장 1,700㎡, 자연형호안 240m, 산책로 270m, 주차장 15,300㎡

- 수목·초본류식재(소나무외16종 12,320주, 물억새외9종 14,400본)

- 실개천 1개소, 생태습지 1개소, 버드나무숲 1개소

추진경위

2008.07.   : 한강공원 특화사업 2단계 추진방안 방침수립

2008.09.11 : 투자심사 완료

2009.6.10.~ 2010.12.28 : 특화사업 기본 및 실시설계용역

2010.11.01 : 하천점용허가(면적 361,000㎡, 연장 2.1㎞, 5년간)

2011.10.31 : 1차 생태공원화사업 완료(75,360㎡)

2011.3.15.~ 2011.7.31 : 물놀이장 조성 설계용역 완료

2012.08.~ 2013.09 : 한강시민위원회 자문(1~6차 자문결과 보완)

2013.4.10.~ 11.30 : 물놀이 친수시설 보완설계

2013.11.25 : 계약심사 완료(원가계산 심사)

2013.11.   : 설계도서 재작성(계약심사 및 설계 자문회의 결과 반영)

공사 발주방법 및 사업비 집행계획 검토

제한경쟁입찰(지역제한)에 의한 장기계속공사로 발주

입찰참가자격

1) 건설산업기본법에 의한 토목공사업(토목건축공사업)면허와 조경공사업 면허를 소지한 업체 또는 토목공사업 면허소지자로 조경공사업 면허소지자와 공동도급이 가능한 업체로서 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

2) 공동도급의 경우 구성원수는 대표자포함 2개사 이내로 하며, 공동수급체 구성원 모두 서울특별시에 소재한 업체이어야 함

※ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제24조(장기계속          계약 및 계속비계약), 제29조(공동계약)

물놀이장과 주차장정비는 동일사업비로 일괄 사업발주

사업비 집행계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	2013년도	2014년도	비 고
계	5,500,000	3,500,000	2,000,000
토목,조경,설비	5,063,000	3,200,000	1,863,000
전 기	297,000	200,000	97,000	분리발주
폐 기 물	140,000	100,000	40,000	분리발주

향후계획

2013.11.29 : 공사 계약의뢰(재무과)

2013.12.20 : 계약 및 착공

2014.10.30 : 1차 공사 준공

2014.12.30 : 사업완료

붙임 : 사업계획위치도 및 사업계획(안) 1부.    끝.

□ 사업계획위치도

□ 사업계획(안)