문서번호	도시철도계획부-2463
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	도시철도설계과장		도시철도계획부장		도시철도국장		도시기반시설본부장
박창복	이명수		代김진팔		김준기		03/23 천석현
협 조
	도시철도토목부장					한동근
	도시철도설비부장					정찬웅
	기획예산과장					최갑영
	경리과장					허금도
	주무관					김용선

9호선 혼잡도 개선을 위한 전동차 증차에 따른

개화차량기지 유치선 증설 계획 검토

서울특별시 도시기반시설본부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

9호선 혼잡도 개선을 위한 전동차 증차에 따른 개화차량지기 유치선 증설계획 보고

지하철9호선 2단계 구간 개통시 열차 혼잡도가 가중될 것으로 예상되어 시민불편을 해소하기 위한 전동차 구매에 따라 개화차량기지의 유치선 증설계획을 검토하여 시행하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

○ 지하철 9호선 혼잡도 개선 및 증차계획(행정1부시장 방침 제88호,‘15.3.10)

- 주요내용 : 조기증차 70량, 중기 증차 80량

○ 지하철 9호선 혼잡도 개선을 위한 전동차 구매계획(본부장 방침, ‘15.3.11)

- 주요내용 : 전동차 구매 70량

Ⅱ		개화차량기지 현황

○ 위    치 : 서울시 강서구 과해동 ~ 인천광역시 계양구 하야동

○ 부지면적 : 398,951㎡

○ 시설용량(유치용량)

구 분	계	9호선 1단계	장래계획	비 고
유치선	49편성	25편성	24편성

○ 현재 25편성(유치선 14편성, 검수고 등 11편성) 확보

○ 장래 차량기지 확장을 고려한 유치선 24편성 부지 확보

Ⅲ		열차 증차 계획

○ 단계별 전동차 증차계획

구 분	계	2011년 증차	2016~2017	2018년 이후	공항철도 직결
차량수	222량	48량	70량	80량	24량
편성수	29편성	12편성	9편성	4편성	4편성

○ 2011년도 증차 48량(12편성)은 유치선 없이 시험선 및 검수고 등에 유치

○ 공항철도 직결 차량 반입후에는 5편성 유치선 부족

- 증설 유치선 24선 대비 29선 소요(29-24=5편성)로 5편성은 본선 주박

○ 전동차 반입계획

- 2016. 9.  : 32량 반입

- 2017.12.  : 38량 반입

- 2018년이후 : 80량 반입

※ 공항철도 직결차량은 현재 국토교통부에서 시행중인「공항철도와 9호선 직결운영을 위한 이행계획 용역」결과에 따라 시행

Ⅳ		유치선 증설 계획

○ 공종별 시설 증설 규모 및 소요사업비                  (단위 : 백만원)

구 분	증설 규모	계	설계비	소요 공사비
계		23,268	724	22,544
궤도분야	궤도부설 L=6.277km 분기기 24틀	6,045	200	5,845
전차선분야	유치선 24선 증설	3,776	145	3,631
신호분야	유치선 24선 증설	13,229	367	12,862
통신분야	유치선 24선 증설	218	12	206

※ 분야별 개별법에 따라 감리용역이 필요한 경우 별도 방침수립 시행

○ 추진 일정

- 실시설계 : 2015. 5. ~ 2015.11(6개월) ⇒ 분야별 시행

- 공사시행 : 2016. 1. ~ 2016. 12(12개월)

∙ ‘16.9 반입 예정인 32량에 대한 유치선은 9월까지 우선 완료

- 공사준공 : 2016. 12.

Ⅴ		행정사항

○ 각 분야별 실시설계에 소요되는 비용은 지하철9호선 2단계 사업비에서 우선 사용(도시철도토목부 협조)

- 예산과목 : 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선2단계건설, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 각 분야별 소요 공사비는 2015년 추경 또는 2016년 예산에 반영

○ 각 분야별 추진부서

- 도시철도계획부 : 궤도분야(유치선) 실시설계

- 도시철도토목부 : 궤도공사(유치선) 발주

- 도시철도설비부 : 전차선, 신호, 통신분야 실시설계 및 공사발주

붙임 : 개화차량기지 평면도 1부.  끝.