투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서남권야구장건립공사 책임감리원
(경유)
제목	하도급 변경계약 처리 통보(서남권야구장건립공사)

1. 서야책감 2015-69,70(2015.3.19.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 우리본부에 검토보고한『서남권야구장 건립공사』의 하도급 변경계약에 대하여 아래와 같이 처리 통보하오니 하도급관리 및 공사관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 하도급 변경계약 내용

수급인	하수급인 (하도업체)	하도급 공사명	하도급 기간		하도급 금액(원)	하도급율 (%)
			변경 전	변경 후
현대산업개발(주)	야림 건설(주)	토목 공사	`09.04.13 ∼ `15.02.28	`09.04.13 ∼ `15.06.30	5,125,855,900	87.25
현대산업개발(주)	포이 닉스(주)	포장 공사	`14.09.15 ∼ `15.02.28	`14.09.15 ∼ `15.06.30	253,142,000	129.98

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김민호		건축총괄과장	강성욱		건축부장	03/24 김우성
협조자	주무관	이석우		주무관	윤용훈
시행	건축부-3267	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층 도시기반시설본부 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2646	/전송	02-3708-2659	/	protossx@seoul.go.kr	/	대시민공개