문서번호	마곡조성담당관-9213
결재일자	2013.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목계획팀장	마곡조성담당관		마곡사업추진단장
이기원	서귀동	하종현		12/02 서노원
협 조

단지조성 공정점검회의 결과보고(16차)

2013. 11

마곡사업추진단

(마곡조성담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 ■ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □

단지조성 공정점검회의 결과보고(15차)

Ⅰ		점검개요

일   시 : ′13. 11. 29(금) 14:00

장   소 :  마곡 1공구 현장사무실

참 석 자 : 마곡조성담당관 (토목계획팀장, 담당)

SH공사 (토목조경팀 담당)

현장소장, 현장감리단장 (1▪2공구, 빗물펌프장, u-City)

안   건 : 단지조성 공정 진행상황 점검 및 추진대책

〔공정현황〕

○ 단지조성공사 : 공정률 59.6% ('13.11.29 현재)

- 간선하수박스   : 1,115m중  1,075m 완료 (96.4%)

- 공동구(1공구)   : 1,158m중    985m 완료 (85.0%)

(2공구)  : 1,506m중  1,352m 완료 (89.8%)

○ 신설 빗물펌프장 : 공정률 26.4%

- 펌프장 구조물 : 2펌프장 상부슬래브 벽체철근조립, BTR 강관추진

○ 유비쿼터스도시건설공사(U-CITY) : 공정률 7.6%

- 1지구 정보통신인프라 관로공사 진행

Ⅱ		점검결과 및 조치

공항로 횡단통로 설치관련 도시철도공사와 원활하고 합리적인  공정추진을 위한 업무협의 관련자료 준비필요(12월 첫주 협의예정)

통신관로 및 상수도관로 등을 가시설매달기하고 하부구간 구조물공사 진행구간에 대하여는 추락/붕괴 등 안전사고 발생이 없도록 사전점검 및 현장 안전관리 철저

동절기가 본격 시작됨에 따라 공사구간내 가설 보행·자전거통행로등에 대한 제설대책 및 안전관리 철저

- 통행인들의 안전사고 발생이 없도록 수시점검 및 안전사고 사전 예방조치 철저

택지계획팀에서 검토중인 도로관리카드 작성이 원활하게 될 수 있도록 가로시설물 등의 관련자료 제공 협조필요