문서번호	토목부-5882
결재일자	2015.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
조현형		권혁대	03/24 노우성
협조
	주무관		강철규

“응봉교 확장 및 성능개선 공사”

자전거 우회도로 설치 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

도시기반시설본부

(토 목 부)

자전거 우회도로 설치 검토보고

【 응봉교 확장 및 성능개선 공사】

응봉교 건설과 관련하여 철도횡단구간 시공을 위한 중랑천 자전거우회도로 설치 검토보고임.

관련근거

○ 응봉감 제2015-078호(2015. 3.23.) : 실정보고(철도횡단구간 신설교량 시공을 위한 중랑천 우안 자전거도로 우회로 개설)제출

공사개요

○ 공 사 명 : 응봉교 확장 및 성능개선 공사

○ 공사위치 : 성동구 응봉동 ~ 성수동(기존 응봉교 구간)

○ 공사규모 : 응봉교 확장 및 성능개선

- 왕복 4차로 → 6차로, 연장 693m(교량 625m, 옹벽 68m)

- 성능개선 : DB18 → DB24

○ 공사기간 : 2008.10. ~ 2015.12.

○ 도 급 비 : 738억원

○ 시 공 사 : 한신공영(주)

○ 감 리 사 : ㈜건화엔지니어링

○ 설 계 사 : 제일엔지니어링

감리 실정보고 내용

○ 철도횡단구간 신설교량 시공을 위하여 중랑천 우안 응봉교 하부 기존 자전거도로를 임시폐쇄하고 공사에 지장이 없은 구간으로 이설하여 이용시민들의 안전 및 편의를 도모하고, 원상복구는 향후 응봉교 하부 둔치 이용시설(체육시설 등) 협의 후 조치함이 타당하다 사료됨.

- 중랑천 우안 자전거우회도로 개설도면

우회 자전거도로

필요 작업공간

기존 자전거도로

○ 주요 수량변경 현황

구 분	규 격	단 위	수 량		증·감	비고
			당초	변 경
-임시 자전거도로 이설
1) 아스콘 표층(T=5cm)		㎡	-	1,038.0	증) 1,038.0
2) 아스콘 구입		ton	-	123.9	증) 123.9
3) 보조기층	T=15cm	EA	-	100.0	증) 100.0
4) 아스콘깨기	T=30cm	㎥	-	51.9	증) 51.9
4) 폐기물처리	콘크리트	ton	-	121.4	증) 121.4
5) 낙하물방지공		㎡	-	180.0	증) 180.0
6) 초화류 굴취 및 식재		㎡	-	160.0	증) 160.0
7) EGI휀스 설치 및 철거		m	-	147.0	증) 147.0
8) 차선도색	백색실선 및 파선	㎡	-	116.7	증) 116.7
	문자및기호(상온식)	EA	-	7.9	증) 7.9
9) 공사안내간판		EA	-	8.0	증) 8.0
10) 임시가로등 설치공사		식	-	1.0	증) 1.0
-폐기물처리
1) 폐아스콘		ton		121.4	증) 121.4

○ 개략공사비

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
도급비	임시 자전거도로 우회	-	35,860	증) 35,860
	소 계	-	35,860	증) 35,860
관급자재비		-	9,960	증) 9,960
폐기물처리비		-	2,093	증) 2,093
총 계		-	47,913	증) 47,913

※ 산출단가(자재비) : 협의율 적용[(69.747+100)/2=84.874%]

(공사계약일반조건 제20조 2항에 의거 협의율 적용)

조치의견

○ 상기 감리의견과 같이 응봉교 하부 기존 자전거도로를 임시폐쇄한 후 별도구간으로 이설하고 추후 설계변경시 반영코자 함.

※ 원상복구는 향후 응봉교 하부 둔치 이용시설 설치시 협의예정.

붙임 : 감리의견서 사본 1부.  끝.