문서번호	시설과-2132
결재일자	2015.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
이동헌		代김윤철	03/25 이용태
협 조
	주무관			남상국

간데공원 시설재정비사업

준공기한 연기 검토보고

2015. 3.

중부공원녹지사업소

시설과

간데메공원 시설재정비사업

준공기한 연기 검토 보고

간데메공원 시설재정비사업 실시설계용역 중 주민설명회 시 제기된 민원 요청사항 관련 추가검토를 위해 기한을 연장하고자 검토 보고드림.

□ 용 역 개 요

○ 용 역 명 : 간데메공원 시설재정비사업 실시설계용역

○ 위    치 : 동대문구 답십리동 471 간데메공원

○ 용역기간 : 2015. 2. 2 ~ 4. 2

○ 도 급 액 : 금15,068,090원

○ 도 급 자 : ㈜피엠디조경기술사사무소 대표 이상종

□ 준공기한 연기

○ 연기기간

- 당  초 : 2015. 2. 2 ~ 2015. 4. 2

- 변  경 : 2015. 2. 2 ~ 2015. 5. 30

○ 연기사유 : 간데메공원 주민설명회에서 제기된 운동시설 정비 민원관련 추가 검토 및 협의시간이 필요하여 연기

○ 지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재는 중부공원녹지사업소, 지체상금은 미부과

□ 보고의견

○ 상기와 같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

첨부: 준공기한연기의뢰서 1부.  끝