함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	대현산배수지 송수관 이중화 부설 관련 급수운영 추진 업무협조

1. 고도정수반-1492호(2015.3.13.) 및 배수과-1943호(2015.3.25.)호 관련입니다.

2. 고도정수반에서 시행중인「구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사」의 대현산배수지 송수관 이중화를 위한 연결공사 추진을 위한 급수운영 일정을 통보하오니 관련부서에서는 원활한 공사시행이 이루어 질수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 대현산배수지 송수관 이중화를 위한 연결공사 추진일정

① 시설물 합동 점검	3.25(수)

② 3단계 연결	3.26(목)~3.27(금)

③ 2단계 연결	3.28(토)~3.29(일)

④ 1단계 연결	3.30(월)~3.31(화)

⑤ 관세척(수질검사 포함)	4.01(수)

⑥ 수계전환(아차산ⓟ→용마배수지)	4.02(목)~4.03(금)

⑦ 4단계 연결	4.06(월)~4.08(수)

※ 단계별 세부 추진사항은 붙임 급수운영 검토 보고서 참조

붙 임 : 1. 연결공사 급수운영 검토 보고서 1부.

2. 수계전환 계획도 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,기전설비과장,동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),급수운영과장
주무관	박종혁		배수과장	전결 03/25 이임섭
협조자
시행	배수과-1946	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개