투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	용역 준공기한연기 의뢰(간데메공원 시설재정비사업 실시설계용역)

1. 시설과-2132(2015.03.25)호와 관련입니다.

2. “간데메공원 시설재정비사업 실시설계용역”의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현황

- 용 역 명 : 간데메공원 시설재정비사업 실시설계용역

- 용역기간 : 2015. 2. 2 ~ 2015. 4. 2

- 도 급 액 : 금15,068,090원

- 도 급 자 : ㈜피엠디조경기술사사무소 대표 이상종

나. 준공기한 연기

용 역 명	계약일	착공일	준 공 기 한		비 고
			당 초	변 경
간데메공원 시설재정비사업 실시설계용역	‘15.1.30	‘15.2.2	‘15.4.2	‘15.5.30

다. 연기사유 : 간데메공원 주민설명회에서 제기된 운동시설 정비 민원관련 추가 검토 및 협의시간이 필요하여 연기

첨부  1. 방침서 1부.

2. 준공기한연기의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	이동헌		주무관	남상국		시설과장	03/25 代김윤철
협조자
시행	시설과-2138	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관2층	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02)3783-5967	/전송	02)3783-5969	/	oil0824@seoul.go.kr	/	대시민공개