의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-5949	(		)
접 수		(		)
결재일자	2015.3.25.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관),건설총괄부장

주무관	토목부장	시설국장	도시기반시설본부장		결재
박상철	노우성	형태경	03/25 천석현
협 조
	광역도로과장			진재섭

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 223번, 신동우의원, 정무위원회)

1. 국회의원 요구자료를 따로붙임과 같이 제출하고자 합니다.

붙 임 :  (국회)의원 요구자료 1부.  끝.

신동우의원(정무위원회, 새누리당)

□ 요구번호 : 223번

1. 강동구 고덕동 아남아파트 앞 횡단보도 설치와 관련 아래와 같이 자료를

요청 하오니 3월 25일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

1) 업무처리순서 및 일정

□   업무처리순서 및 일정

업 무	일 정	업무담당자
		담당부서(담당자)	연 락 처
추가규제심의 결과 통보(예정일: 가정)	3.23∼3.25	서울지방경찰청 교통관리과(김민호)	02-700-5118
교통규제심의 반영 실시설계 협의 및 완료	3.25∼3.31	동부도로사업소 기전과(김동현) 동부도로사업소 도로보수과(이민호)	02-2040-0362 02-2040-0356
실시설계 승인서류 접수 및 승인	4.01∼4.05	동부도로사업소 기전과(김동현) 동부도로사업소 도로보수과(이민호)	02-2040-0362 02-2040-0356
신호등 철거 및 설치공사	4.06∼4.22	도시기반시설본부 설비부(지장환)협조 신성건설(오재섭) 동부도로사업소 기전과(김동현)	02-3708-8611 02-426-1239 02-2040-0362
신호등 신호관련 경찰청 DB신청	4.17∼4.22	서울지방경찰청 (조성학)	02-720-4034
횡단보도 도색작업	4.21∼4.22	도시기반시설본부 토목부(박상철) 신성건설(오재섭) 동부도로사업소 기전과(이민호)	02-3708-2559 02-426-1239 02-2040-0356
동부도로사업소 준공계 접수 및 승인	4.22∼4.25	동부도로사업소 기전과(김동현) 동부도로사업소 도로보수과(이민호)	02-2040-0362 02-2040-0356
횡단보도 개통	4.26	도시기반시설본부 토목부(박상철)	02-3708-2559

※ 일정은 기상에 따라 변동이 있을수 있음.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	진재섭
	☎3708-2559	담당자	박상철
	작 성 일 : 2015. 3.24.