문서번호	녹지관리과-1207
결재일자	2015.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		녹지관리과장		공원부장
김화시		문경재		03/25 장상규
협 조
	환경과장				代김영진

2015년 생태공원 시설개선공사 추진 계획

한강사업본부

녹지관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 생태공원 시설개선공사 추진 계획

한강 암사생태공원 시설확충공사로 설치한 학습센터 내 화장실 등 편의시설 부족으로 시민불편 민원이 발생하여 다음과 같이 시설개선공사를 시행하여 편리하고 쾌적한 공원환경 조성에 기여코자 함.

Ⅰ		공원현황

위    치 : 강동구 암사동 616-1일대 암사생태공원

면    적 : 162,000㎡

조성연도 : 2008. 12. 28

주요시설 : 학습센터, 탐방로, 관찰데크, 억새 군락지 등

	생태학습 센터 개요
▶ 위 치 : 암사동 613-11 ▶ 설치연도 : 2014. 12. 12. ☞「2014년 암사생태공원 시설확충공사」로 설치 ▶ 규 모 : 151.67㎡ (1층103.67㎡, 2층 48㎡) ▶ 구 조 : 컨테이너 (2층) ▶ 이용현황 - 1층 : 생태프로그램 운영 학습실 및 관리창고 - 2층 : 생태공원 민간위탁 관리 사무실

Ⅱ		이용현황

이용인원(연간)

구 분	계	공원탐방객	프로그램 참여인원
이용인원	553,030명	541,000명	12,030명

학습센터 입지여건

- 암사생태공원 내 높은 구릉에 위치하여 있으며 전방 약150m 부근 카라반 형태의 이동식 화장실 및 주차장 등이 위치해 있음.

이용실태 및 문제점

- 생태공원 탐방 및 프로그램 참가자들은 주로 어린이들로 화장실 이용시 자전거 도로를 150M 걸어서 이용하고 있는 실정이며 안전사고의 우려도 있음.

- 학습센터 내 수도시설이 전혀 없어 프로그램 진행 시 물을 사용 할 수 없으며 음용 및 손을 씻을 시설이 없어 불편 민원이 많음.

Ⅲ		개선방안

1안 : 카라반 이동식 화장실 이전 설치

- 자전거 도로옆으로 위치한 이동식 카라반을 생태학습센터 옆으로 이전설치 하는 방안으로 별도 화장실 설치비는 들지 않으나 수도 및 전기 오수관로 등이 이전설치비가 발생함.

2안 : 학습센터 앞 이동식 화장실 신규 설치

- 학습센터 주 이용객이 어린이며 이용 대상에 맞는 화장실 설치와 신규 설치된 학습센터와의 경관성 등을 고려한 신규 화장실 설치

보고자 의견 : 2안

- 1안 선택시 카라반화장실이 학습센터 전면을 가려 미관상 좋지 않으며 자전거 도로 측면으로 자전거를 타며 이용했던 기존 이용객들의 불편 민원이 생길 수 있으며, 생태공원 내 주 이용객인 어린이들이 이용하기에도 맞지않는 시설이므로 비용 및 규모를 최소화 하여 신규설치 하는 것이 좋을 것으로 사료됨

Ⅳ		사업계획

위    치 : 암사생태공원 학습센터 앞

사업기간 : 2015년 3월 ~ 6월

사업내용 : 이동식 화장실 설치

구 분	세 부 내 용	소요예산 (천원)	시행부서
시설공사	· 이동식 화장실 설치 - 설치규모 : 남자 소변기1조, 대변기1조, 여자 대변기 2조, 세면기 각 1대 (어린이 사용가능 시설) - 설치방법 : 관급자재 구매 설치	40,000	녹지관리과
설비공사	· 전기, 오수, 상수도 배관 등 설치 공사	10,000	환 경 과

사 업 비 : 50,000천원

예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 생태공원 운영 및 유지관리, 시설비(100-401-01)

Ⅴ		추진일정

2015. 03. ~ 04. : 설비공사 발주 및 시행

2015. 05. ~ 06. : 이동식 화장실 구매 및 설치

Ⅵ		행정사항

환 경 과

- 화장실 설치 설비공사 시행

- 집중 호우시 이동식 화장실 이설 등.

붙임 : 현황사진 및 화장실 설치 안 1부.  끝.