투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	917공구 전기분야 설계변경 공사비 변경금액 송부

1. 유탑전감 2015-079(2015.3.16)호 및 도시철도설비부-3022(2015. 3.25)호와 관련입니다

2. 위 호와 관련 전기분야 10차분 설계변경 심의후 변경금액 및 공사비 변경금액을 송부하오니 총괄설계변경 등에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 심의후 변경금액

(단위:천원)

구 분	심 의 전	심 의 후	증 감	비 고
9차	1,721,838	1,721,838	-	직접공사비
10차	803,343	765,127	감 38,216
총괄	2,525,181	2,486,965	감 38,216

나. 설계변경 공사비 변경금액

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
9차	1,721,838	1,721,838	-	직접공사비
10차	514,348	765,127	증 250,778
총괄	2,236,186	2,486,965	증 250,778

끝.

	도시철도설비부장
주무관	황영필		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	03/26 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-3070	(		)	접수		(		)
우	100-731	서울 중구 서소문로 89 순화빌딩 12층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	부분공개