문서번호	조경과-4125
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설팀장	조경과장
최경주		하재호	03/26 이원영
협조

- 물을 이용한 친수공간 조성 사업 -

사업 대상지 변경 요청 건 검토보고

2015. 3.

푸른도시국

(조경과)

- 물을 이용한 친수공간 조성사업 -

사업 대상지 변경요청 건 검토 보고

구로구으로 부터 ‘2015년 물을 이용한 친수공간 조성 사업’ 대상지 변경 요청이 있어 이에 대한 검토보고임.

□ 추진경위

○ ’14. 12월 : 예산편성(’15년도 2,550백만원)

○ ’15. 1. 7 : ’15년도 사업 추진계획 수립

○ ’15. 1. 8 : 추진계획 시달(조경과 → 성북구 등 8개 자치구)

○ ’15. 3.19 : 대상지 변경 승인 요청(구로구 → 조경과)

□ 변경 요청사항

○ 변경내용

구 분	당 초	변 경
대상지	오류동 65-6일대 오류역 북측광장	오류동 135-49일대 서해안로 데크광장
규 모	200㎡	400㎡
사업비	250백만원	250백만원

○ 변경사유

- 당초 대상지가 ‘행복주택 건설을 위한 오류동 주택지구’ 조성 사업지와 중첩되어 사업추진이 곤란하여

- 여건이 비슷하며 오류동 주민이 이용할 수 있는 대상지로 변경 요청

□ 대상지 검토

○ 1호선 오류동역과 주택지 인근 및 서해안로(시도로, 왕복2차선) 옆에 위치한 주민쉼터 광장으로 시민의 통행량 및 차량의 이동량이 많음

○ 주변에 휴게쉼터가 조성되어 있어 바닥분수를 설치할 경우 여름철 물놀이 공간과 청량감 있는 휴식공간으로 시민에게 제공 가능

▶ 위치도	▶ 대상지 현황

□ 보고자 의견

○ 시민의 이용이 많은 지하철역 및 광장 주변에 위치한 대상지(시유지)로 주변 여건 등을 검토한 바,

○ 사업효과가 있을 것으로 사료되므로 대상지 변경 승인하고자 함.

붙임 : 사업대상지 변경 요청서 1부.  끝.