투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(한강공원 나들목 증설공사-옥수)

1. 우리 본부에서 추진중인 『한강공원 나들목 증설공사(옥수)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(옥수)

나. 계약기간 : 2013. 4. 19 ∼ 2015. 9. 30

다. 계약금액 : ￦3,493,426,000원

라. 시 공 사 : 신성월드건업(주), 대보실업(주)

마. 감 리 사 : ㈜케이알티씨, ㈜서영엔지니어링

바. 설계변경

- 총       차

구 분	총 차			비고
	당 초	변 경	증·감
총공사비	4,495,595,000	4,598,254,000	증 102,659,000
도급비	3,493,426,000	3,676,000,000	증 182,574,000
관급자재비	852,139,000	796,454,000	감 55,715,000
이전비	150,000,000	125,800,000	감 24,200,000

- 차수별 금액

구 분	1 차			비고
	당 초	변 경	증·감
금 액	1,200,000,000	1,488,699,050	증 288,699,050

사. 설계변경사유

- 말뚝공법 변경(철도시설공단 요구사항 반영), 옹벽 시공연장 조정(감 37m), 옥수빗물펌프장내 교량 미시공, 지장물(전력선, 가로등) 이설, 보험료 정산

- 세부내용

(단위 : 백만원)

설계변경 내용	총사업비	도급비	관급비	이전비	관 련 근 거
계	증 103	증 183	감 56	감 24
․ 말뚝공법 변경	증 374	증 374			현장여건 반영을 위한 시공방법 변경보고 (본부장방침, 2013.11.5.)
․ 옹벽 시공연장 조정	감 138	감 108	감 30
․ 옥수빗물펌프장 내 교량 미시공	감 127	감 101	감 26
․ 지장물(전력선 및 가로등)이설공사	-	증 24		감 24	지장물 이설계획 보고 (부장 결재, 2013.10.15.)
․ 3대보험정산	감 6	감 6			-

아. 예산과목 (1차 :‘13년 예산)

- 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선, 한강 접근체계 개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설비(100-401-01)

: 1,188,699,050원

- 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 시설비(국가하천유지보수 국고보조금)

: 300,000,000원

첨부 : 1. 관련보고서 2부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

주무관	권혁정		치수과장	김용제		시설부장	代김용제		한강사업본부장	12/16 한국영
협조자	주무관	최승룡		주무관	장보금		기획예산과장	이사형
총무과장	김영기		계약1팀장	김점선
시행	치수과-4236	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	3780-0683	/전송	3780-0744	/	seoulroad@seoul.go.kr	/	대시민공개