문서번호	시설관리과-5859
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
유준영	문용욱	이자원	03/26 이상래
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(2014년 가압장 기계설비 수리)

2015. 3. 26(목)

강서수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(2014년 가압장 기계설비 수리)

우리사업소에서 시행 중인 『‘14년 가압장 기계설비 수리(연간단가)』에 대한 설계변경 사유가 발생하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

사업개요

사 업 명 : 2014년 가압장 기계설비 수리(연간단가)

계 약 자 : (주)세고산업 대표자 : 배영석

계약기간 : 2014. 3. 28 ~ 2015. 3. 31까지

계약금액 : 35,315천원

사업규모 : 가압장 모터펌프 수리(9대) 등 기계설비 수리

- 볼류트펌프 수리 : 7.5Kw×2대, 22Kw×2대

- 수륙양용펌프 수리 : 15Kw×2대, 22Kw×1대

- 수중펌프 수리 : 7.5Kw×2대

- 자재비 및 기타 1식

설계변경 사유

부품 재사용 예산절감(물량감소)

- 분해점검 결과, 재사용이 가능한 모터절연 보강 및 라이너링 물량감소

물량 증․감 발생

- 궁동 1호기 메카니칼씰 누유부위 수리에 따른 물량증가

- 액츄에이터 설치(1대) 물량감소

- 고재처리 물량감소

설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
수리비	공 급 가 액	32,104,636원	28,463,000원	감)3,641,636원
	부 가 세	3,210,464원	2,846,300원	감)364,164원
	합 계	35,315,100원	31,309,300원	감)4,005,800원

심의개요

심의일시 : 2015. 3. 26(목) 10:00

심의장소 : 사업소 4층 회의실

심의위원

- 위원장 : 시설관리과장

- 위  원 : 공업6급 문용욱, 시설6급 김근용, 시설6급 손종백, 시설6급 문병희

- 간  사 : 공업7급 유준영

심의내용 : 설계변경 적정 여부

심의결과

설계변경의 타당성 : 적정

설계변경 세부내용 및 사유 : 적정

물량변동의 적정성 여부 : 적정

조치 의견

상기 심의결과에 따라 설계변경 시행후 우리사업소 행정지원과에 변경계약을 의뢰코자 함.

붙임 1. 설계변경 심의결과서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원☎3146-3990 기전팀장 : 문용욱☎4015 담당 : 유준영☎4016