문서번호	급수운영과-6415
결재일자	2015.3.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박경원		03/26 조면행
협 조
	주무관			이상무

준공기한 연기 보고

2015. 03

강서수도사업소

(급수운영과)

「공사명 : 2014년 고척1동외 7개동 상수도공사(단가계약)」

준공기한 연기보고

명에 의거「고척1동외 7개동 상수도공사(단가계약)」급수공사 감독업무 수행 중 발생한 사항에 대하여 그 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2015.  03.  26.

보고자 : 시설7급  성명 박 경원

□ 공사 현황

연번	위 치	지시번호	공사개요	공사기한	비 고
1	개봉동 117-1	신설142	D=30mm, L=7m	2015.03.20 ~03.26

□ 보고 내용(관련대호:㈜이준엔지니어링100-29호(‘15.03.24))

○ 구로구 개봉동 117-1호 도시형생활주택 신축에 대한 급수공사 시행        코자 하였으나,

○ 건축공정 지연에 따른 내부배관 미비 및 외부자재(비계) 미철거 등        으로 준공기한 내 공사가 불가한 실정임.

□ 조치 의견

○ 상기와 같이 주민 생활불편 민원 최소화를 위한 공사기한을 연   기 조치하여 공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

○ 귀책사유 및 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 공사기한 변경

연번	위 치	지시 번호	공사기한 변경		비 고
			당 초	변 경
1	개봉동 117-1	신설142	2015.03.20 ~03.26	2015.03.20 ~03.31

따로붙임.  공사연기 실정보고서((주)이준엔지니어링) 1부.  끝.