문서번호	마곡조성담당관-9628
결재일자	2013.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목계획팀장	마곡조성담당관		마곡사업추진단장
이기원	서귀동	하종현		12/17 서노원
협 조

단지조성 공정점검회의 결과보고(17차)

2013. 12

마곡사업추진단

(마곡조성담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 ■ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □

단지조성 공정점검회의 결과보고(17차)

Ⅰ		점검개요

일   시 : ′13. 12. 16(월) 16:00

장   소 :  마곡 1공구 현장사무실

참 석 자 : 마곡조성담당관 (토목계획팀장, 담당)

SH공사 (토목조경팀 담당)

현장소장, 현장감리단장 (1▪2공구, 빗물펌프장, u-City)

안   건 : 단지조성 공정 진행상황 점검 및 추진대책

〔공정현황〕

○ 단지조성공사 : 공정률 62.1% ('13.12.15 현재)

- 간선하수박스   : 1,115m중  1,075m 완료 (96.4%)

- 공동구(1공구)   : 1,158m중  1,038m 완료 (89.6%)

(2공구)  : 1,506m중  1,381m 완료 (91.7%)

○ 신설 빗물펌프장 : 공정률 27.0%

- 펌프장 구조물 : 2펌프장 상부슬래브 레미콘타설, BTR 강관추진

○ 유비쿼터스도시건설공사(U-CITY) : 공정률 7.7%

- 1지구 정보통신인프라 관로공사 진행

Ⅱ		점검결과 및 조치

안전의식이 느슨해지기 쉬운 동절기에 타현장에서 안전사고가 발생하고 있는 점을 고려하여 구조물공사, 굴착공사 구간과 임시 우회통행로 등 마곡지구 공사장에서 안전사고 발생이 없도록 사전점검 및 현장 안전관리 철저

- 공사장내 적설로 인한 장비 및 통행자 등의 미끄럼 사고 등이 발생하지 않도록 작업구간 통행로 제설 철저

‘14년 상반기 추진되는 임시저류지 공사계획 등 수립시 매각부지에 대한 토지활용에 지장이 없도록 일정, 위치 등 관련사항 연계 검토 필요

교통운영과에서 요구한 공항로 중앙버스전용차로 추진현황 자료 조속 작성하여 제출 협조