문서번호	하천관리과-19870
결재일자	2013.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하천관리과장	물관리정책관
이병우		이진용	12/18 정만근
협조
	청계천관리팀장		지세진

청계천 개선보완 마스터플랜 수립 용역

준공기한 연기보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 12.   .

도시안전실

(하천관리과)

청계천 개선보완 마스터플랜 용역 준공기한 연기보고

“청계천 개선보완 마스터플랜 수립 연구용역”에 대하여 준공기한을   아래와 같이 연기코자 함

▢ 용역개요

○ 용 역 명 : 『청계천 개선보완 마스터프랜 수립 연구』 용역

○ 용역기간 : 2013. 3. 22. ~ 2014. 1. 15.(10개월)

○ 용 역 비 : 452,800천원

○ 용 역 사 : (재)서울연구원 대표 이창현

○ 과업내용

- 청계천 개선보완 마스터플랜 수립 연구 등

▢ 준공기한 연기

구 분	계약일	준공일	비 고
당초	2013. 3. 22	2014. 1. 15	-
변경	2013. 3. 22.	2014. 2. 28.	과업기간 연장(44일)

▢ 준공기한 연기사유

○ 계획공정상 8월 23일로 계획된 제1차 중간보고를 위한 청계천시민위원회 일정이       을지연습 및 시의회 일정 등으로 순연됨에 따라 용역기간을  연기조치

- 제1차 중간보고(8월→9월), 제2차중간보고(10월→11월), 시민설명회(11월→12월)

○  지체상금 미부과 : 연기 귀책사유가 서울특별시에 있음

▢ 향후계획

○ 준공기한 연기의뢰(재무과) 및 통보(서울연구원)

○ ‘14년 1월중 최종보고회의 개최, 최종보고회의 결과반영 및 보고서 작성

○ ‘14년 2월말 보고서 발간 및 준공. 끝.