함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(수서배수지 건설공사 건설폐기물처리용역 전체2회, 4차분1회)

우리 본부에서 시행중인 「수서배수지 건설공사 외 1건 건설폐기물 처리용역(전체, 4차분)」을 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 수서배수지 건설공사 외 1건 건설폐기물 처리용역

나. 용역개요 : 건설폐기물 처리 및 운반 7,686ton

다. 용역기간 : ’11. 07. 27 ~ ’13. 12. 31

라. 소요예산 : 145,255천원

마. 예산과목 : 구축물(수서배수지 건설공사), 시설비 및 부대비(시설비)

바. 도 급 자 : (주)조광환경산업개발 대표 조만기

사. 설계변경 내역

1) 전체

단위 : 원

구 분	당 초	변 경	증·감
순용역 원가	126,064,158	136,273,378	10,209,220
제경비	5,985,842	6,411,168	1,063,454
부가가치세	13,205,000	14,268,454	1,063,454
1차분 계약시 절삭금액	-	-27,000	-27,000
용역비 계	145,255,000	156,926,000	11,671,000

2) 4차분

단위 : 원

구 분	당 초	변 경	증·감
순용역 원가	30,933,592	41,142,815	10,209,223
제경비	1,289,863	1,715,185	1,063,455
부가가치세	3,222,345	4,285,800	1,063,455
용역비 계	35,445,800	47,143,800	11,698,000

아. 설계변경 사유

1) 수서역 뒷길 무명로 가시설 설치구간 지장물 우회 및 Open Cut 시공으로아스팔트 터파기 폭 변경(3.5m→5m)에 따른 폐기물 수량 증가

2) 무명로 기존 포장층 외 하단부 아스팔트 포장층 추가 발견 및 과거 매립 폐콘크리트 발생 등으로 폐기물 수량 증가

붙  임 : 1. 설계변경 설명서 각 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.

3. 합의서 각 1부.

4. 관련 실정보고 검토 보고서 1부.  끝.

주무관	이경훈		시설과장	박기범		급수부장	이상홍		상수도사업본부부본부장	12/23 김준기
협조자	★주무관	문병기		주무관	김종필		재무회계과장	채규평
기획예산과장	조세연
시행	시설과-8445	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1454	/전송	02-3146-1429	/		/	대시민공개