문서번호	시설보수과-2574
결재일자	2015.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영원		정재현	03/27 이승진
협조

실정보고사항 검토결과 보고

(창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사)

2015. 3

북부도로사업소

시설보수과

실정보고사항 검토결과 보고

(창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사)

우리사업소에서 시행하고 있는 『창동지하차도 장애인 이동 편의시설

설치공사』에 대하여 시공사로부터 실정보고한 사항 검토 보고임

공사현황

❍ 공 사 명 : 창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사

❍ 공사기간 : 2014. 11. 26. ∼ 2015. 6. 30.

❍ 도 급 액 : 742,258,700원

❍  공사개요  :  콘크리트암거(2.1×2.6)설치 26m, 엘리베이터 덕트설치 14m,

도로포장 31.4a, 보도포장 501㎡, 하수관이설 106m, 표면보수 810㎡

❍ 도 급 자 : 주식회사 고황 대표 김미숙

실정보고 내용

❍ 교통소통대책심의 결과 안전시설 추가 설치 및 보행자 안전통로 확보토록 의결사항 반영

❍ 하수관설치를 위한 굴착시 공사구간내 특고압 전기배선이 매설되어 있어 흙막이 가시설(토류판)에서 합벽구조로 변경

❍ 공사비 증감 : 12,010,000원 증

검토결과

서울시 교통소통대책심의 결과 공사구간내 시민안전 및 교통안전상 위험요소 해결을 위해 안전관련 시설물 추가 실치토록 의결된 사항에 대한 반영 및 이마트앞 하수관 이설을 위한 굴착시 특고압 전기배선의 매설로 인한 흙막이 가시설 부분의 일부를 합벽구조로 변경하는 사항으로 공사시행을 위하여 변경 시공함이 타당함.

조치사항

시공사 의견과 같이 설계변경 시행 및 공사에 철저를 기하여 기한내 완료될 수 있도록 통보

붙  임 : 실정보고서 공문 1부.  끝.