함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 유량계 유지보수 용역 설계 변경(정산) 시행

1. 우리 본부에서 시행 중인 2014년 유량계 유지보수용역에 대해 아래와 같이 설계변경하여 정산 시행하고자 합니다

가. 용 역 명 : 2014년 유량계 유지보수용역(연간단가계약)

나. 계 약 자 : *************

다. 계약금액 : ************************************

라. 과업내용 : 교정검사, 유량계 점검, 유량감시시스템 관리 등

마. 계약기간 : 2014.04.01 ~ 2015.03.31

바. 설계변경 내용

1) 변경내역                                          (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
용역원가	***********	***********	***********	************** ****************
부가가치세	**********	**********	**********
총 용역비	***********	***********	***********

2) 변경사유

- 유량계 운휴 발생으로 교정검사 물량 감소 및 전송반 점검물량 증가

- 감시시스템 웹(web)수정 및 DB 추가 물량 감소

- 소규모 수선 재료비의 과업이행 실적감소

3) 예산과목

- ‘14년 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

- ‘15년 : 상수도사업비용, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

붙임 : 1. 설계변경(정산) 보고서 1부

2. 변경설계서 및 월별 용역 준공내역 각1부

3. 물량변동 산출근거 1부.

4. 합의서 1부. 끝

주무관	김명구		누수방지과장	김영삼		시설안전부장	03/30 강신재
협조자	주무관	김미정		주무관	윤완호		재무회계과장	조두업
시행	누수방지과-2508	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로51 시설안전부 누수방지과	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	kms5608@seoul.go.kr	/	부분공개(7)