문서번호	조경과-7015
결재일자	2013.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
조진성	윤희숙	이성주	정상택		12/27 안영노
협 조
	시설과장			배병렬
	주무관			한상길
	주무관			김태극
	주무관			김기배

「백두산호랑이숲 조성공사」 설계변경(제2차) 검토보고

2013. 12.

서 울 대 공 원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 백두산호랑이숲 조성공사 -

설계변경(제2차) 검토보고

「백두산호랑이숲 조성공사」 추진과 관련 실정보고 사항과 현안사항 검토회의 결과에 대하여 종합검토하고 아래와 같이 설계변경하고자 보고드림

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 백두산호랑이숲 조성공사

○ 공사기간 : 2012. 12. 27 ~ 2013. 12. 31 (장기계속공사)

○ 공사내용 : 호랑이방사장 확장, 내실보수, 기반시설 정비 등

○ 총공사비 : 1,979,590,510원 (도급액 1,866,308,000원, 관급비 113,282,510원)

※ 도급액 : 총1,866,308,000원 (1차분 806,540,910원, 2차분 1,059,767,090원)

○ 도급업체 : 미래종합조경(주) 주정수, ㈜신영그린시스 심재홍

Ⅱ		변경내용검토

1) 관련근거

○ 현안사항 검토회의 결과보고 : 조경과-5356(2013.10.4.)

○ 공사 실정검토보고

- 조경 : 조경과-4221(2013.8.2.), 6047(2013.11.11), 6591(2013.12.6)

- 토목 : 시설과-4113(2013.8.28)

○ 공사착수보고(2013.1.28.), 실무회의 결과보고(10, 17, 21, 22, 23, 24차)

2) 주요 변경내용

< 조경분야 >

○ 수목식재 : 공원내 기존 수목 활용방안 강구 (착수보고시 지시사항)

- 대형목은 공원내 생육중인 소나무, 느티나무를 봄철 가식 작업 후 맹수사로 이동 식재

- 방사장내 식재는 단풍나무, 잣나무 등 주변의 수목을 이식하고 당초 계획물량은 감조정

- 수목제거, 지장수목 이식은 실물량 반영

○ 시설물공사

- 벽천 신설, 동물 탈출방지를 위한 방사장 뒷편 인공암 높임, 기존 인공암 보수 및 도색 (현안사항 검토회의)

- 호랑이앉음석 변경(인공암→자연석), 방사장분리대 변경(목재가림막→휀스+수목식재), 관람로포장 변경(흙→블록), 안전휀스 지주보강 등 (실정검토보고 및 실무회의 의견 반영)

- 경관을 고려한 관람대C 마감 변경(뿜칠→목재), 관람로 우배수로(플륨관) 감조정 및 디자인그레이팅으로 변경. 자연석쌓기, 등의자 설치 등 실시공물량 변경 반영

< 토목분야 >

- 뒷방사장 및 진입부 관리도로 아스콘 포장 신설 (현안회의 및 실정검토보고)

- 맹수사 ↔ 소동물관 사이 오수관로 개량 신설 (실정검토보고)

< 건축분야 >

- 뒷방사장 추문(4개) 추가교체 및 사육사실 철문 교체 (동물복지과 요구사항)

< 설비분야 >

- 계류 퇴수관(2개소) 관경 변경 및 계류B 퇴수관(200mm) 신설 (동물복지과 요구사항)

- 방사장내 호랑이음수전(4개소) 신설 (실무회의 의견 반영)

< 기타사항 >

- 현장여건에 따른 실시공 물량 설계반영 정산

3) 변경물량 및 내역 : 별첨

4) 설계변경 금액 및 확보방안

○ 변경금액

- 총 차

구 분		금 액		증 감
		당 초	변 경
총공사비		1,979,590,510	2,446,640,330	467,049,820
도급액	공급가액	1,696,643,636	2,161,102,727	464,459,091
	부가가치세	169,664,364	216,110,273	46,445,909
	계	1,866,308,000	2,377,213,000	510,905,000
관급자재비		113,282,510	69,427,330	-43,855,180

- 1차분

구 분		금 액		증 감
		당 초	변 경
총공사비		822,573,400	870,702,950	48,129,550
도급액	공급가액	733,219,009	778,362,118	45,143,109
	부가가치세	73,321,901	77,836,212	4,514,311
	계	806,540,910	856,198,330	49,657,420
관급자재비		16,032,490	14,504,620	-1,527,870

- 2차분

구 분		금 액		증 감
		당 초	변 경
총공사비		1,157,017,110	1,575,937,380	418,920,270
도급액	공급가액	963,424,626	1,382,740,609	419,315,983
	부가가치세	96,342,464	138,274,061	41,931,597
	계	1,059,767,090	1,521,014,670	461,247,580
관급자재비		97,250,020	54,922,710	-42,327,310

○ 2012년 사고이월(관급자재 감추산) 및 2013년도 본예산 활용하여 설계변경 시행

※ 전기 및 통신공사 변경계획

○ 방사장 가림막 수목휀스 설치에 따른 전책 및 내실철책 교체에 따른 전동문 조작반 교체 추가 등 (약15백만원) - 전기공사 낙찰차액 활용

○ CCTV추가 및 수달사 광케이블 접속공종 추가 (약13백만원) - 통신 및 폐기물 낙찰차액 활용

Ⅲ		보고자 의견

○ 위 보고한 바와 같이 본 공사에 대하여 설계변경 조치하고,

○ 설계변경사항 시공과 공사완료 전 전문가자문에 따른 의견반영 및 동물적응 등 시험운영 기간이 필요하므로 공사기한 연기 조치 (2014. 2. 28일 까지) : 지체상금 미부과

붙임 : 변경설계서 및 실정검토 보고서 각 1부.  끝.