문서번호	토목부-6300
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
강철규		권혁대	03/30 노우성
협조

“용비교~행당중간 도로개설공사”

실시공 물량으로 정산시행 검토보고

(자전거도로 임시이설 및 복구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

도시기반시설본부

(토  목  부)

“용비교 ~ 행당중간 도로개설 공사”

실시공 물량으로 정산 시행 검토보고

용비교(교각8) 시공시 저촉되는 자전거도로를 임시 이설한 후 강교거치 완료후에 원상복구함에 따라 실시공한 물량으로 정산한 사항에 대하여 검토 보고드림

관련근거

○ PH15-용행감-060호(2015. 3.20.) : 실정보고 승인요청

(교각8 자전거도로 이설)

공사개요

○ 공 사 명 : 용비교 ~ 행당중간 도로개설공사

○ 공사위치 : 성동구 금호4가동 ~ 성수1동 구간

○ 공사규모 : 도로(용비교) 확장 및 도로개설

- 확장폭 : 5.2m(왕복 4차로 → 6차로), 연장 719m

○ 공사기간 : 2007. 3. ~ 2015.12.

○ 도 급 비 : 26,477백만원

○ 시 공 사 : 한신공영(주)

○ 감 리 사 : ㈜평화엔지니어링, ㈜선진엔지니어링

감리단 검토의견

○ 용비교(교각8) 시공시 근접해 있는 기존 자전거도로가 저촉되어 중랑천쪽으로 우회하여 임시 이설(성동구와 협의)하였다가, 강교거치 완료후 원상복구한 사항으로 실시공에 맞추어 정산하는 것은 적정함.

- 임시이설 : 폭 4.0m, 연장 94m (콘크리트 포장 T=10cm)

[기존 자전거도로 및 우회 임시포장 현황]

평 면 도

공사 시행 협의

○ 우리시 : 신규 공종의 단가는 낙찰율 65.09% 적용코자 함.

○ 도급자 : 신규 공종의 단가를 협의율 100% 적용하여줄 것을 요구.

(한신용비 제700-2045호 : 2015. 3.27.)

[수량 증감 및 개략공사비]

공 종	규격	단위	당초	변경	증.감	비고
가. 토공
1)무근콘크리트깨기	T=30cm미만	㎥	-	28	28
나, 부대공
1)콘크리트포장	T=10cm	㎥	-	31	31
2)보조기층포설및다짐	T=10cm	㎥	-	28	28
3)흙쌓기 및 헐기		㎥	-	4,656	4,656
4)안전휀스		m	-	206	206
5)공사안내간판		ea	-	6	6
다. 관급자재
레미콘	25-21-8	㎥	-	33	33
라. 폐기물처리	폐콘크리트	ton	-	73.595	73.595

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
가. 토공	-	333	333
나. 부대공	-	16,706	16,706
순공사비	-	17,039	17,039
제 잡 비	-	4,084	4,084
물가변동비	-	536	536
도급공사비	-	21,659	21,659
관급자재비	-	1,834	1,834
페기물처리비	-	1,738	1,738
총 공사비	-	25,231	25,231

[신규공종 단가는 협의율 (100%+65.09%) / 2 = 82.54% 적용]

조치의견

○ 감리단 의견과 같이 용비교(교각8) 시공에 저촉되는 자전거도로를 성동구와 협의하여 임시이설 및 원상복구한 사항에 대하여 실시공 물량으로 정산함이 타당하다고 사료됨.

○ 신규 공종의 단가에 대하여 협의가 되지 않아 부득이 “공사계약일반조건 제20조 제2항”에 따라 강제협의율(82.54%) 적용함.

붙임 : 감리의견서 사본 1부.  끝.