문서번호	방재시설부-4089
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	03/30 임춘근
협조
	주무관		고소영

「경춘선 폐선부지 공원조성공사』

안전관리비 사용계획 실정보고 검토

2015. 03

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성공사』

안전관리비 사용 및 계획 실정보고 검토

「경춘선 폐선부지 공원조성공사」 안전관리비 사용(정산) 및 계획 실정보고에 대한 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015–190(2015.03.16)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계)

○ 위    치 : 노원구 공릉동 공덕제2철도건널목 ~ 육사삼거리

○ 규    모 : 공원조성 연장(L)=1.90km, 면적(A)=48,170㎡

○ 사업기간 : 2013.10.10. ~ 2015.5.15

○ 공 사 비 : 6,044백만원

Ⅱ

검토내용

○ 관련규정 검토

- 안전관리비 계상 : 건설기술진흥법 제63조 및 동법 시행규칙 제60조

- 안전관리비 사용항목

· 안전관리계획서 작성 및 검토비용

· 공사현장의 안전점검비

· 공사장 주변 안전관리 비용

· 통행안전 및 교통소통 대책 비용(설치, 유지관리 등)

○ 현장 안전관리비 사용항목 및 내용

- 통행안전 및 교통소통 대책 비용

· 공사 경계구간 및 횡단 보행통로 안전휀스 설치 및 유지관리 비용

· 화랑대로변 및 공원 횡단구간 등 보도포장을 위한 보행안전도우미 배치비용

· 기타 안전시설(안내판, 보행매트, 윙카, 신호봉 등) 비용

○ 안전휀스 설치도

14.11~15.2 : 보행자 안전 및 동절기 공사 중단에 따른 공사장 안전을 위해 임시 보행로 제외한 모든 구간 안전휀스로 차폐 (1,138경간, 2,731m)	15.3~4월(계획) : 시공완료구간 안전휀스 철거 하였으며 공사 중인 구간에 대해 공사 완료시까지 안전휀스 존치(639경간, 1,663m)

○ 보행안전도우미, 안전시설 유지관리원 배치도

화랑대로변 자전거도로 및 보도 포장관련 보행도우미 배치	연장이 긴 선형공원으로 멀티휀스 및 보행안전시설유지 관리원 배치

○ 휀스, 보행자도우미,안전시설 설치 사진

○ 수량 검토

- 안전휀스 설치

구 분	규 격	계 획	실 적	잔 량	비 고
1. 안전휀스 2개월 (14.11~12월)	경간	445	445	-	설치 및 철거완료
2. 안전휀스 6개월 (14.11~15.4)	경간	693	693	-	실 설치기간으로 정산예정
소 계	경간	1,138	1,138	-

- 보행자안전도우미

구 분	단 위	계 획	실 적	잔 량	비 고
1. 2014년도 평일	일	268	268	-	기 투입 완료
2. 2014년도 주말	일	33	33	-
3. 2015년도 평일	일	99	-	99	실 투입 일수로 정산 예정
4. 2015년도 주말	일	44	-	44
소 계	일	444	301	143

- 보행안전시설

구 분	단 위	계 획	실 적	잔 량	비 고
1. 보행매트	m	620	620	-	설치 중
2. 윙카	ea	190	95	95	실 설치 및 반입수량으로 정산예정
3. 신호봉	ea	15	12	3
4. 안전조끼	ea	10	5	5
5. 안내판	ea	15	10	5

- 안전시설 유지관리 인원(보통인부, 1일 2일 × 2개조)

구 분	단 위	계 획	실 적	잔 량	비 고
1. 평일(26일×4명)	명	104	-	104	안전휀스 및 안전시설물 유지보수관리 (이동설치 포함)
2. 주말(4일×4명)	명	16	-	16
소 계	명	120		120

○ 단가 검토

- 보행자안전도우미 : 보통인부 적용(2014년 하반기 및 2015년 상반기)

- 휴일 노무비 50%할증(근로기준법) 적용

- 안전시설물 : 견적서 및 실비 적용

○ 안전관리비 사용내역 검토

(단위 : 천원)

구 분	규 격	계 획	실 적	잔여분	비 고
1. 안전휀스	W2,400×H1,000	75,991	43,702	32,289
2. 보행안전도우미	보통인부	42,011	27,523	14,488
3. 보행안전시설	각 종	14,785	10,970	3,815
4. 안전시설 유지관리	보통인부	11,239	-	11,239
소 계		144,026	82,195	61,831

○ 안전관리비 집행현황 검토

(단위 : 천원)

계상된 안전관리비	사용계획	실 적	잔여분	비 고
200,000	144,026	82,195	61,831

※ 제경비 및 부가가치세 별도

Ⅲ

건설사업관리기술단 검토의견

○ 상기와 같이 『경춘선 폐선부지 공원조성공사』 설계에 반영된 안전관리비 사용계획(정산 포함)에 대하여 현장 여건(연장 1.9km, 주택가 인접, 유동인구, 민원)을 고려하여 검토한 결과 사용기준 및 산출내용(수량,단가)이 적절하게 반영된 것으로 판단되며,

○ 잔여분에 대해서는 실 투입 및 설치에 따라 정산코자 함.

Ⅳ

보고자 의견

○ 『경춘선 폐선부지 공원조성공사』 와 관련된 안전관리비 사용계획(정산 포함)에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인 통보 및차후 설계 변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.