문서번호	설비부-10277
결재일자	2014.9.19.
공개여부	부분공개
방침번호

	시 민
주무관	열빛총괄과장
지장환	09/19 권오식

『구리암사대교 연결도로공사』

설계변경 소위원회 자문 요청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09.

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	설비부 - 10234	요청부서	설비부	요청일	2014. 9. 18.
공 사 명	구리암사대교 연결도로건설공사
감리개요	공사규모	사업연장(L) = 1.88km 폭원(B) = 25 ~ 35m (6차로)
	공사기간	2012.08.02. ~ 2014.12.31
	감 리 사	㈜도화엔지니어링, ㈜제일엔지니어링종합 건축사사무소
	설 계 사	㈜경화엔지니어링
	시 공 사	㈜신성건설, ㈜평광건설, ㈜대우종합조경
심의요청 사 유	∘ 3,000만원 이상 설계변경
토목부-16041(2014.8.19.)호에 의거 설계변경 자문요청
주 요 변 경 내 용
○ 기존 보안등 가 이설 및 원상복구 ○ 기존 CCTV가 이설 본 이설 ○ 기존 진동감시센서 이설공사
별첨서류	1. 설계변경 자문 자료 1부(별첨).

건 명 : 구리암사대교 연결도로공사 설계변경

■ 현 황

계 약 명	구리암사대교 연결도로공사		시 공 자	㈜신성건설외 2개사
공 사 규 모	사업연장(L) = 1.88km 폭원(B) = 25 ~ 35m (6차로)	계 약 금 액	18,161,000천원			계약일
						2012.07.27
공사기간	2012.08.02. ~ 2014.12.31	감리자	㈜도화엔지니어링외 1개사		설계자	㈜경화엔지니어링
계약형태	기타( ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사( )				※ 작성자: 지장환 ☎ 3708-8611

■ 설계변경 개요

(단위 : 천원)

공 종	설계변경개요	증/감	비고
보안등 가 이설 및 복구	가설 등주설치 10개소 케이블 포설 498m 전선관 설치 488m	56,628
	보안등 복구 10개소 케이블 포설 498m 전선관 설치 488m
CCTV 가 이설 및 본 이설	- 가 이설 CCTV 5개소 - 전선관 75m	19,316
	- 본 이설 CCTV 5개소
진동감지센서 이설	함체설치 6대 시그널 디렉터 6set 케이블포설 800m 비상호출 케이블 450m	49,456
설계변경 금액		125,400

■ 설계변경 배경

○ 암사아리수정수센터 방호울타리 이설에 따른 관리기관 협의결과 부속시설물(보안등,

CCTV, 감지센서, 케이블)을 가 이설 및 공사 완료 후 원상복구토록 한 사항 반영

■ 설계변경 세부내용

구 분	내 용	선택 항목
설계변경 유형	① 설계도서 내용 불투명, 누락, 오류. 상호모순 ② 지질, 용수 등 현장조건 상이 ③ 신기술, 신공법 적용 ④ 민원수용, 보수, 보강 ⑤ 피해 건물보상 ⑥ 정책, 계획 등 변경 ⑦ 구조형식변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 운반거리변경 ⑩ 유관기관요청 ⑪ 물가변동에 따른 계약금액조정	① ⑩
계약금액 조정 (단위 : 천원)	① 증액 : 125,400천원 ② 감액 : 원 ③ 공사비 변경없음( )	①
설계변경 효과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편의증진, ⑦ 민원해소 ⑧ 설계보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진	⑧

※  해당사항 우선순위로 복수 선택 가능

■ 설계변경 경위

○ 설계변경 실정보고

. 2014.09.16. : 설계변경 소위원회 심의요청(고덕감리2014-389)

. 2014.08.19. : 설계변경 자문 요청(토목부-16041)

○ 설계변경 승인절차

- 토목부 설계변경 심의요청 ➞ 설비부 설계변경소위원회(계약금액 조정심의) ➞ 심의결과 통보(설비부‣토목부)

끝.