문서번호	설비부-11680
결재일자	2014.10.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
지장환		권오식	10/22 박기형
협조
	주무관		김은덕

「구리암사대교 건설 전기공사」

설계변경 및 3차공사 준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

설 비 부

「구리암사대교 건설 전기공사」

설계변경 및 3차공사 준공기한 연기 검토보고

구리암사대교 전기공사 중 책임감리단으로부터 설계변경 및 3차분 준공기한 연기 요청이 있어 검토한 결과임.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 암사감리 2014-732(‘14.10.20) : 공기연장(3차) 및 계약내역(3,4차)변경 요청

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설 전기공사

○ 공사내용 : 가로등 설치 604본, 경관조명 설치 1식

○ 공사기간 : '10. 07. 28 ~ '14. 12. 31

○ 도급금액 : 총차 3,913,778천원 (3차 1,389,683천원, 4차 678,371천원)

○ 시 공 사 : 모범전설(주)

Ⅲ		보 고 내 용

○ 설계변경(내역변경)

- 변경사유 : 토목공사 추진일정에 맞춰 전기공사 차수별(3차 ↔ 4차) 내역 변경

- 주요 변경내용

(단 위 : 백만원)

공 종		3차 공사				4차 공사
		수량	금액변경			수량	금액변경
			변경전	변경후	증·감		변경전	변경후	증·감
가로등	•가로등 기초	182본	497	495	-2	+182본	247	249	+2
	•가로등 제어반	+ 14면				- 14면
	•계량기 함	+ 2면				- 2면
	•가로등 설치(기계화시공)	- 173본				+ 173본
	•전선관	+ 955m				- 955m
	•케이블	1,330m				+1,330m
	•잡자재 및 인건비	1식				1식
경관조명	•Line LED 18W	300개	323	321	-2	+ 300개	81	83	+2
	•SMPS 함	+ 6 면				- 6 면
	•잡자재 및 인건비	1식				1식
간접비		1식	327	331	+4	1식	129	125	-4
합 계			1,147	1,147	0		457	457	0

○ 3차공사 준공기한 연기

- 연기사유 : 토목공사 추진일정에 맞춰 전기공사 준공기한 연기

- 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
3차	‘13.02.28 ~ ’14.10.31	‘13.02.28 ~ ’14.11.30	증) 30일
4차	‘14.07.01 ~ ’14.12.31	‘14.07.01 ~ ’14.12.31	변경없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		조치 의견

○ 구리암사대교 건설 전기공사의 원활한 추진을 위한 감리단 검토 의견이 적정한 것으로 판단됨으로,

○ 3차·4차공사 계약내역 및 3차공사 준공기한을 위와같이 변경하여 계약부서(재무국 재무과)에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임 :  1. 감리단 공문 및 합의서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 3차분공사 변경 공정표1부.끝.