문서번호	토목부-6375
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
조현형		권혁대	03/31 노우성
협조
	주무관		강철규

“응봉교 확장 및 성능개선공사”

철도인접 교각 가시설 계측기 설치 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

도시기반시설본부

(토 목 부)

철도인접 교각 가시설 계측기 설치 검토보고

【 응봉교 확장 및 성능개선 공사】

응봉교 교각 P6 시공을 위한 흙막이가시설이 중앙선과 인접함에 따라 계측기를 설치 지반거동 및 가시설변형 등을 파악하여 운행중인 철도의 안전을 확보하기 위한 검토보고임.

관련근거

○ 응봉감 제2015-080호(2015. 3.23.) : 실정보고(철도인접구간 교각 P6 흙막이가시설 계측기 설치)제출

공사개요

○ 공 사 명 : 응봉교 확장 및 성능개선 공사

○ 공사위치 : 성동구 응봉동 ~ 성수동(기존 응봉교 구간)

○ 공사규모 : 응봉교 확장 및 성능개선

- 왕복 4차로 → 6차로, 연장 693m(교량 625m, 옹벽 68m)

- 성능개선 : DB18 → DB24

○ 공사기간 : 2008.10. ~ 2015.12.

○ 도 급 비 : 738억원

○ 시 공 사 : 한신공영(주) 외1

○ 감 리 사 : ㈜건화 외1

○ 설 계 사 : 제일엔지니어링 외 1

감리 실정보고 내용

○ 중앙선 철도시설물과 인접하게 시공되는 교각 P6 흙막이 가시설시공구간에 대하여 계측기를 설치하여 지반거동 및 가시설 구조의 변형 등을 파악함으로써 중앙선 철도 운행의 안전성을 확보토록 조치함이 타당하다고 사료됨.

- 교각 P6 흙막이 가시설 계측기 설치개요

○ 계측기별 설치개요

구 분	규 격	단 위	수 량		증·감	비고
			당 초	변 경
교각 P6 가시설 계측기 설치
1) 지중경사계 및 지하수위계 겸용	수동식	EA	-	2	증) 2
2) S/T 하중계	수동식	EA	-	3	증) 3
3) 변형률계	수동식	EA	-	2	증) 2
4) 지표침하계	수동식	EA	-	3	증) 3

○ 개략공사비

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경			비 고
		설계가 [100%]	협의율 [84.874%]	낙찰율 [69.747%]
접속교 P6 흙막이 가시설 계측	-	37,510	31,790	26,180
총 계	-	37,510	31,790	26,180

○ 공사시행 협의

- 우리시 : 신규 공종에 대하여 낙찰율 69.747% 적용 협의

- 도급자 : 신규 공종에 대하여 100% 반영요청 회신

○ 공사시행 협의(안)

- 신규 공종으로 공사시행 협의를 하였으나 협의가 되지 않아 부득이 공사계약일반조건 제20조 2항에 의거 강제협의율(84.874%) 적용함.

조치의견

○ 상기 감리의견과 같이 지반거동 및 가시설 변형을 파악하여 철도운행의 안전성을 확보하기 위해 철도인접 교각 P6에 계측기를 설치하고 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 감리의견서 사본 1부.  끝.