함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	계약(설계) 변경 시행[2014년도 자동제어설비 유지관리 용역] - 최종

1.「2014년도 자동제어설비 유지관리 용역」건에 대하여 아래와 같이 계약(설계)변경 시행코자 합니다.

가. 공사명 : 자동제어설비 유지관리 용역

나. 계약상대자 : ㈜다우텔레콤 대표 이영순

다. 계약기간 : 총 365일(‘14. 4. 1. ~ ’15. 3. 31.)

라. 변경사유 : 당초 계약내역 물량 증·감

마. 설계변경 : 계약금액 변경

구분	당초	변경	증․감
1차 계약금액	금42,034,310원	금42,034,310원	완료
2차 계약금액	금15,126,540원	금14,647,330원	감479,210원
총 계약금액	금57,160,850원	금56,681,640원	감479,210원

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장․배수지 등
시설물 유지관리, 수선유지교체비, 기타교체비

붙임 :  1. 최종 계약변경 보고 1부

2. 15년 3월분 기성내역서 1부.

3. 2차 준공내역서 1부.

4. 설계변경 사전심의 의결서 1부.

5. 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	이원준		기전팀장	오준식		시설관리과장	03/31 代고신석
협조자
시행	시설관리과-6601	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4617	/전송	02-3146-4639	/	wonjun76@seoul.go.kr	/	대시민공개