투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자 부담공사 공사기간 변경 요청

1. 기전과-7277(2014. 9.16.)호, 기전과-8154(2014.10.20.)호 및 도로보수과-6808(2014.11.21.)호와 관련입니다.

2. 교통안전시설물 원인자부담 공사에 대하여 아래와 같이 공사기간을 변경코자 하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사 교통안전시설 원인자 부담공사

나. 공사기간

- 당  초 : 2014.11.21. ~ 2015. 3.31.

- 변  경 : 2014.11.21. ~ 2015.12.31

다. 위    치 : 구리암사대교남단 ~ 훈련원사거리

라. 공사내용 : 노면표시선 도색, 교통표지판, 신호기이설 및 신설

마. 연기사유 : 서울지방경찰청 규제변경.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 동부도로사업소장(기전과장)
★주무관	박상철		광역도로과장	진재섭		토목부장	03/31 노우성
협조자
시행	토목부-6426	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	scpark555@seoul.go.kr	/	대시민공개