투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재(특수페인트) 납품기한 연기 및 수량 변경 요청

1. 도로보수과-1609(2015.02.17)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행 중인 『2015년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사』에 소요되는 관급자재(특수페인트) 납품기한 연기 및 수량을 아래와 같이 변경요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 관급자재구매(특수페인트)

나. 납품요구번호 : 12-15-2-11220-00

다. 계 약 자 : 대화페인트공업(주)

라. 납품기한 연기

1) 당 초 : 2015. 09. 29

2) 변 경 : 2015. 12. 31

마. 수량변경 내역

물품식별번호	품 명	규 격	단위	수 량 변 경		비 고 (증·감)
				당 초	변 경
22407164	특수페인트 융착식 노면 표지용 도료	KS M 6080 4종 흰색(R5) 20kg	포	4,330	5,431	증) 1,101
22407184	특수페인트 융착식 노면 표지용 도료	KS M 6080 4종 노란색(R3) 20kg	포	537	750	증) 213
22407185	특수페인트 융착식 노면 표지용 도료	KS M 6080 4종 노란색(R4) 20kg	포	965	1,211	증) 246
22407167	특수페인트 융착식 노면 표지용 도료	KS M 6080 4종 파란색(R3) 20kg	포	126	144	증) 18

바. 변경사유 : 노면표시 연간단가 공사기간에 맞추어 납품기한 연기 및 자전거도로 신설 및 유지보수공사에 따른 관급자재 물량 증가.  끝.

	도로보수과장
주무관	권세봉		도로보수과장	03/31 代이상하
협조자
시행	도로보수과-3154	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203(상암동 825번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8359	/전송	300-8364	/	se1212@seoul.go.kr	/	대시민공개