문서번호	방재시설부-4213
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
조양연		이도헌	03/31 임춘근
협조

설계변경(총차7, 2차6회) 및 3차발주 검토보고

-공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사-

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

도시기반시설본부

(방재시설부)

설계변경(총차7, 2차6회) 및 3차발주 검토보고

-공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사-

우리시 시설관리공단에서 제출한 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사 설계변경(총차7회, 2차6회)건과 3차 공사 발주에 검토 보고임.

※ 관련근거 : 공사감독2처-2811호(2015.3.26.)

사업개요

◦ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

◦ 공사규모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 469㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진(Ø1,500mm@2련) 53m

◦ 공사기간 : 2013. 1. 8 ~ 2015. 6. 30(2차:2013.11.13.~2015.3.31.)

◦ 도 급 액 : 총차 6,819백만원 (2차 3,267백만원)

◦ 시 공 사 : (주)승영기술공사 대표 김성찬

◦ 위탁감독 : 서울시시설관리공단 공사감독2처

설계 변경에 따른 보고 내용

가. 설계변경 사유

1) 실정보고[면목4동 관로보수보강(WRC)] 및 공단 심의 결과 반영과 2차공사 준공에 따른 전체 제경비(각종 보험료) 정산 반영

2) 총차 변경 금액 : 감)87,040,500원

3) 2차공사 변경은 계약금액 변동없이 내역변경

※ 제비율 검증 프로그램 확인 결과 이상없슴.

나. 공사비 변경(증ㆍ감)

○ 총차분(제7회)                                       (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	11,691,500,000	11,691,500,000	-
도 급 비	6,819,865,500	6,732,825,000	감) 87,040,500
관 급 비	842,245,200	842,245,200	-
이설비 및 기타	4,029,389,300	4,116,429,800	증) 87,040,500

○ 2차분(제6회)                                         (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	5,021,000,000	5,021,000,000	-
도 급 비	3,267,770,000	3,267,770,000	-
관 급 비	427,092,710	427,092,710	-
이설비 및 기타	1,326,137,290	1,326,137,290	-

※ 2차 준공 정산에 따른 내역 변경,

○ 3차분 발주 내역                                      (단위 : 원)

구 분	총 차	1 차	2 차	3차(금회)
도 급 비	6,732,825,000	352,717,000	3,267,770,000	3,112,338,000

조치의견

◦ 위탁감독이 제출한 설계변경도서를 검토한 바. 2차공사 준공에 따른 전체 제경비(각종 보험료)를 정산한 감)87,040,500원을 설계변경(총차7회, 2차 6회)에 반영하고자 하며 별첨 3차 내역서와 같이 차수 공사를 시행하고자 함.

붙임 : 1) 총차7회, 2차6회 설계변경내역서 1부.

2) 3차 발주내역서 1브.  끝.