2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	코오롱e엔지니어링(주)
(경유)
제목	음식폐기물 자원화 집중처리장치 회수시스템 제작설치 실정보고 검토 회신

1. 코오롱e엔지니어링(주) 공사팀-15-397(‘15.3.18)호 및 생활환경과-202(’15.1.6)호와 관련입니다.

2. 귀사와 물품계약(제작설치) 납품예정인 “음식폐기물 자원화 집중처리장치 제작설치” 실정보고에 대하여 아래와 같이 검토회신 하오니 계약기한내 납품에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 계약건명 : 음식폐기물 자원화 집중처리장치 회수시스템 제작설치

○ 납품기한 : ‘15.10.8

○ 계약금액 : 290,000,000원

○ 검토내용 : 물품변경(절단이송기 14대 및 부대설비 감소)

- 마포구 현대빌라 참여포기로 14대 취소

※ 추후 납품(제작설치)완료 후 현장확인 및 납품가 정산처리 예정임

첨 부 : 도시형 음식폐기물 자원화집중처리장치 시범사업 사업대상지 변경 통보 공문(사본) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김선윤		음식폐기물관리팀장	한성현		생활환경과장	03/31 정흥순
협조자
시행	생활환경과-4663	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길15 서울시청 서소문별관1동 12층 생활환경과	/
전화	2133-3744	/전송	2133-1027	/		/	대시민공개