문서번호	정보자원운영과-1131
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		정보자원운영과장		데이터센터소장
송상봉		김영숙		03/31 이계헌
협 조
	소통지원팀장				신익수
	정보자원관리팀장				현창기
	사회적경제정책팀장				김설희
	주무관				김희경

- 2014 국내 중소기업 ICT 인프라 시범구축사업 -

서비스 이관 및 시스템 운용계획

2015. 3

서울시데이터센터

(정보자원운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

- 2014 국내 중소기업 ICT 인프라 시범구축사업 -

서비스 이관 및 시스템 운용계획

국내 중소 ICT기업과 상생을 위한 「2014 국내 중소기업 ICT 인프라 시범구축사업」과 관련, ISP에서 선정된 업무시스템에 대하여 체계적인 자료이관 및 테스트를 실시하여 안정적인 서비스를 제공하고자 함.

ICT (Infomation & Communication Technoly) : 정보통신기술

Ⅰ		관련근거

□“서울시 IT 인프라 국산화 추진계획”- 부시장방침 제388호(2013.9.13.)

□“「2014 서울시 국산 ICT 인프라 활성화」 추진계획”- (2014.9.19.)

Ⅱ		사업개요

	< 서울시 국산 ICT 활성화 >
○ 사 업 명 : 2014 국내 중소기업 ICT 인프라 구축 시범 용역 ○ 사업기간 : 2014.12.1. ~ 2015.4.29.(150일간) ○ 계약금액 : 238백만원 (협상에의한계약) ○ 계약업체 : (주)한국이디에스컨소시엄 ○ 사업내용 - 서울시 국내 중소기업 ICT 인프라 활성화 전략 수립 - 국내 중소기업 ICT 인프라 시범환경(실증센터) 구축 - 국내 중소기업 ICT 인프라 적용 AP․DB 전환 및 시범 운영

Ⅲ		추진내용

□“서울시 국산 ICT 활성화전략(ISP)” 수립 (‘14.12. ~‘15.3. )

❍ ISP 결과 ⇨ 업무시스템 2종 국산 ICT 선정 및 적용

	전 환	신 규
국산ICT 적용업무	시정홍보물심의관리시스템	사회적경제통합정보시스템

❍ 정보자원 운영기반 국산ICT 활성화 연차별 전략

구 분	기반조성기(2014년)	성숙기(2015년~2016년)	활성화기(2017년~2018년)
	단독서버환경	가상화환경	클라우드환경
국산 ICT 인프라
	x86서버(2종) DBMS(1종)	x86(2종), L2스위치(2종) NAS 스토리지(1종) DBMS(1종)	x86(2종), L2스위치(2종) NAS 스토리지(2종) DBMS(1종)
업무 시스템	전환(1종), 신규(1종) 총 2종	전환(25종), 신규(5종) 총 30종	전환(45종), 신규(5종) 총 50종

□ 국내 중소기업 ICT인프라 시범환경구축(‘14.12. ~‘15.1. )

❍ 국산 H/W 및 국산/공개 S/W 기반 정보시스템 시범환경 인프라 내역

구 분	용도	기존(모델)	개선(모델)
H/W	서버	HP 슈퍼돔(외산)	이슬림(국산)
S/W	OS	유닉스(외산)	레드햇(공개)
	DBMS	오라클(외산)	큐브리드(공개)
	WEB/WAS	제우스(국산)	JBoss(공개)
부대 장비	스토리지	EMC DMX4(외산)	IBM V7000(외산) 히다찌 HUB110M(외산)
	네트워크	시스코(외산)	시스코(외산) 알테온(국산)
	백업	Netbakcup(외산)	Netbakcup(외산)

□ 외산 → 국산 ICT로 전환 및 테스트 (‘15.1. ~ 3. )

❍ 테스트용 자료구축 : DB 전환 및 AP 프로그램 수정 (정상 완료)

❍ 단위 테스트 : 개발자에 의한 프로그램 단위별로 기능 테스트 (정상 완료)

❍ 통합 테스트 : 업무관점에서 시나리오에 따라 서비스 테스트 (정상 완료)

❍ 성능 테스트 : DB 부하 테스트 (기존 시스템과 성능 유사)

□ 국내 중소기업 ICT 환경으로 서울시 업무시스템 적용(‘15.2. ~ 3. )

❍ 업무시스템 적용시 개선(변경) 내용

업무명	개선(변경)전	개선(변경)후
시정홍보물심의관리시스템	∘ 메인화면 ∘ 파일업로드 ∘ 인사 DB 링크	∘ 메인페이지 재구성 ∘ 파일업로드 컴포넌트 교체 ∘ 배치 작업으로 동기화
사회적경제통합정보시스템	∘ 직원만 사용	∘ 직원 및 사회적경제지원센터 등 외부인도 사용
	∘ 내부망만 서비스 예정 - AP(Web/Was) 서버(JBoss) ※외부망구축 불가(국정원 보안성 미필) - DB서버(레드헷) 국산서버로 신규구축	∘ 내‧외부망 서비스로 변경 - AP(Web/Was)서버 계약정보통합 관리서버(Jeus) 활용 구축 - DB서버(레드헷) 국산서버로 신규구축

Ⅳ		향후일정

1		시정홍보물심의관리시스템

□ 인수테스트 및 AP 전환·DB 이관

❍ 인수테스트 : ‘15. 4.1(수) ~ 4.3(금)

- 신 시스템이 기존시스템과 동일한 기능을 수행하는지 기능 테스트 실시

❍ 1차 AP전환·DB이관 : ‘15. 4.3(금) 19:00 ~ 4.4(토)

❍ 시범 병행운영(신/구 시스템) : ‘15. 4.6(월) ~ 4.17(금)

- 신/구 시스템에서 동일한 자료를 입력하여 같은 결과가 나오는지 검증

□ 서비스 오픈 : ‘15. 4.20(월) 09:00

❍ 최종 AP전환·DB이관 : ‘15. 4.17(금) 19:00  ~ 4.18(토)

❍ 서비스 오픈을 위한 사전 점검 : ‘15. 4.18(토) 09:00 ~ 12:00

2		사회적경제통합정보시스템

□ AP·DB 구축 및 시범운영

❍ 서비스 탑재 및 시범 운영 : ‘15. 4.20(월) ~ 4.24(금) 예정

- 구축된 시스템에 대하여 부서 요구사항 수행여부 검증 및 보완

□ 서비스 오픈 : ‘15. 4.30(목) 예정

Ⅴ		행정사항

□ 시정홍보물심의관리시스템

❍ 시민소통담당관

- 인수테스트 실시 및 시범 병행운영(오류 검증 및 보완 요청)

- 서비스 오픈을 위한 사전 점검

❍ 정보시스템담당관

- 인수테스트 실시 및 시범 병행운영(오류 검증 및 보완 요청)

- 서비스 오픈을 위한 사전 점검

- 업무 인수 및 AP 유지관리(안정화 기간 2개월 이후)

❍ 데이터센터

- 서비스 오픈 후 안정화 2개월간 헬프 지원(개발 인력 1명 상주)

- 시스템 모니터링 수행 및 부서 추가 기능개선 사항 반영

- 업무 인계(안정화기간 이후) 및 H/W 및 S/W (DB, OS, 백업) 유지관리

□ 사회적경제통합정보시스템

❍ 사회적경제과

- 업무서비스 입주요청 및 추진일정 데이터센터와 공유

❍ 데이터센터

- 서비스 입주 지원 및 H/W 및 S/W (DB, OS, 백업) 유지관리