투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시데이터센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	“국산 ICT 활성화 사업” 서비스 이관 및 시스템 운영계획 협조

1.“국내 중소 ICT 기업과 상생을 위한「2014 서울시 국산 ICT인프라 활성화」추진계획”(정보자원운영과-2388,2014.9.19)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련,“2014 국내 중소기업 ICT 인프라 시범구축”사업과제인 서울시 국산ICT 활성화전략(ISP) 결과, “시정홍보물심의관리시스템”과“사회적경제통합정보시스템”이 국산 ICT 적용 업무로 선정되어 시스템 구축 및 테스트 중에 있는 바, 다음과 같이 자료이관 및 시범 운영 등 서비스 이관에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

-       다         음      -

가. ISP 결과 선정업무

	전 환	신 규
부 서	시민소통담당관(업무) 정보시스템담당관(유지관리)	사회적경제과(업무/유지관리)
국산ICT 적용업무	시정홍보물심의관리시스템	사회적경제통합정보시스템

나. 작업 일정

1) 시정홍보물심의관리시스템

❍ 인수테스트 및 AP전환·DB이관

- 인수테스트 :‘15. 4.1(수) ~ 4.3(금)

- 1차 AP전환·DB이관 :‘15. 4.3(금) 19:00 ~ 4.4(토)

- 시범 병행운영(신/구 시스템) :‘15. 4.6(월) ~ 4.17(금)

❍ 서비스 오픈 :‘15. 4.20(월) 09:00

- 최종 AP전환·DB이관 :‘15. 4.17(금) 19:00  ~ 4.18(토)

- 서비스 오픈을 위한 사전 점검 :‘15. 4.18(토) 09:00 ~ 12:00

2) 사회적경제통합정보시스템

○ AP·DB 구축 및 시범운영

- 서비스 탑재 및 시범 운영 :‘15.4.20(월) ~ 4.24(금)

○ 서비스 오픈 : ‘15.4.30(목)

다. 행정사항

○ 시민소통담당관

- 인수테스트 실시 및 시범 병행운영(오류 검증 및 보완 요청)

- 서비스 오픈을 위한 사전 점검 실시

❍ 정보시스템담당관

- 인수테스트 실시 및 시범 병행운영(오류 검증 및 보완 요청)

- 서비스 오픈을 위한 사전 점검 실시

- 업무 인수 및 AP 유지관리(안정화 기간 2개월 이후)

❍ 사회적경제과

- 업무서비스 입주요청 및 추진일정 데이터센터와 협의

붙임 : 서비스 이관 및 시스템 운용계획 1부.  끝.

	서울특별시데이터센터소장
수신자	서 울 특 별 시 장(시민소통담당관),서 울 특 별 시 장(정보시스템담당관),서 울 특 별 시 장(사회적경제과장)
주무관	송상봉		주무관	김희경		정보자원운영과장	김영숙		데이터센터소장	04/01 이계헌
협조자
시행	정보자원운영과-1144	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울 서초구 남부순환로 340길 49호(서초동 393-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	3470-1438	/전송	3470-1449	/	songsb@seoul.go.kr	/	대시민공개