문서번호	시설과-1443
결재일자	2015.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목시설팀장	시설과장		서부공원녹지사업소장
임은영	윤학수	임병국		04/01 안해칠
협 조

『서서울호수공원 다목적운동장 정비공사』

현 안 사 항 보 고

2015. 4.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『서서울호수공원 다목적운동장 정비공사』

현 안 사 항 보 고

■ 공사개요

공 사 명 : 서서울호수공원 다목적운동장 정비공사

공사위치 : 신월배수지 상부(급수인원 143천명)

	<신월배수지>
- 준 공 : 1990년도(약 25년경과) - 상 태 : 콘크리트 구조물(무량판구조), 배수지 내·외부 노후화 계속 진행 중 ※무량판구조 : 수평보(beam)이 없이 기둥과 slab로 구성 - 관리기관 : 강서수도사업소

공사기간 : 2014. 5. 9 ~ 2015. 5. 31

공사개요

- 배수불량에 따른 황토흙(기존) 절취 및 마사토 포장 3,479㎡

- 맹암거(D200mm) 88m, 맹암거(D150mm) 232m

- 풋살골대 1조, 이동식 족구장 4조(라인마킹 399m, 네트)설치 등

도 급 비 : 58,831,830원

도 급 자 : 산수조경  대표 김영권

■ 강서수도사업소 공사승인 회신내용

작업시 다짐 등 인력로울러 사용

- 구조용역 검토결과는 5kN/㎡ 소형장비 사용가능이지만, 25년 경과된 배수지 취약성을 감안 3.5kN/㎡ 미만(인력로울러 등)으로 제한

신월배수지 구조물에 무리한 하중이 주어질 경우 취약부분 변형 및 파손 발생 등 배수지 안전성 초래

노면관리 위한 약품 및 소금 등 사용 불가 등

■ 검토의견 : 회신내용 사실상 공사불가함

신월배수지는 143천여명의 가정으로 직접 급수되는 곳임

공사로 인한 미세한 균열 발생 등으로 누수 및 이물질 혼입시 지역 급수주민의 막대한 생활 피해 초래

노후된 시설물로 안전성 확보가 어려운 신월배수지 상부 설치보다는 향후 타 부지를 물색하여 추진하는 것이 바람직하다고 판단됨.

붙  임 : 『서서울호수공원 다목적운동장 정비공사』추진경위 1부.  끝.

■ 붙 임 - 추진경위

2014. 3.	5	서서울호수공원 재조성 추진계획 수립
2014. 4.	23	서서울호수공원 다목적운동장 정비공사 발주
2014. 5.	15	배수지 상부 정비계획 알림(서부→강서)
2014. 5.	16	배수지 상부 정비계획관련 회신(강서→서부) - 장비투입시 배수지 구조물 안전에 대한 검토 사전협의 요구
2014. 6.	16	1차 준공기한 연기(당초 6. 27→변경 10. 30)
2014. 6~	9	구조안전검토협의(메일 및 미팅, 서부↔(재)한국건설품질연구원) - (재)한국건설품질연구원에서 강서수도사업소 관리 배수지에 대한 구조안전용역 진행중, 연구원측 담당자와 구조검토 협의
2014. 10.	20	2차 준공기한 연기(당초 10. 30→변경11. 30)
2014. 11.	21	강서수도사업소와 업무협의 - 구조안전진단 실시 후 그 결과에 따라 사업 진행
2014. 11.	25	다목적운동장 정비공사 준공기한 연기(~15.2.28)
2014. 12.	15	신월배수지 구조안전성 검토용역 시행
2015. 2.	9	다목적운동장 정비공사 준공기한 연기(~15.5.31)
2015. 2.	25	신월배수지 구조안전성 검토용역 결과보고회 개최 - 5.0kN/㎡ 이하 장비사용시 구조안전상 문제없음
2015. 3.	4	신월배수지 상부 다목적운동장 정비공사 승인요청(서부→강서)
2015. 3.	11	신월배수지 상부 다목적운동장 정비공사 승인요청 회시(서부→강서) - 조건부 승인
2015. 3.	16	발주기관, 시공사 등 공사 가능여부 등 논의 - 시공사 의견 : 강서측 <조건부 승인>사항에 따른 시공은 불가