문서번호	수처리연구과-2130
결재일자	2015.4.1.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	수처리연구과장	★수도연구부장	상수도연구원장
최연규	박현	최영준	04/01 정득모

2015년 신규연구과제 추진계획

(생물활성탄 여과지 운영방안 연구)

수도연구부

수처리연구과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□■	□

2015년 신규연구과제 추진계획

(생물활성탄 여과지 운영방안연구)

서울시 고도정수처리 도입에 따른 생물활성탄 효율평가 및 활성탄여과지 역세조건설정 등 적정 운영방법 도출을 통해 정수센터 운영기술을 지원하고자 함

Ⅰ		연구개요

□ 연구배경 및 목적

○ 연구배경

- 서울시 고도정수처리 도입에 따른 정수센터별 활성탄여과지 효율평가 및 운영 최적화 지원필요

- 정수센터 현안사항으로 활성탄여과지 역세척 주기결정 및 지침제시 요청(2014년 정수센터와의 간담회)

○ 연구목적

- 계절별 활성탄여과지 적정 역세척 주기 및 방법제시

- 생물활성탄 운영에 따른 미생물 및 입자누출 최소화방안 마련

- 고도정수처리에 의한 생분해성 물질 저감방안 도출

□ 연구기간 : 2015년 1월 ~ 2016.12월 (2개월)

□ 추진방법

○ 고도정수처리 실증플랜트연구 : 오존 및 활성탄컬럼을 이용한 적정 운영조건 분석

○ 정수센터 현장실험 공동연구 : 정수센터 활성탄여과지 운영조건 설정 및 문제점 해결

□ 연구원

○ 책임연구원 : 수처리연구과 최연규

○ 공동연구원 : 수처리연구과 조우현, 이건수

강북정수센터 이종관, 구의정수센터 김성재

Ⅱ		추진현황

□ 추진현황

○ 신규과제 선정심의회

- 일시 : 2015년 2월 25일(수)

- 결과 : 선정 (연구기획과-1430)

○ 연구시설 정비 : 고도정수처리 실증플랜트 컬럼실험 준비

- 활성탄 여과지 신탄 충진 : 2015.2.23

- 온라인 계측기 설치 및 상시모니터링 : 탁도, 입자수, TOC

○ 정수센터 공동연구 협의 : 강북, 구의, 암사정수센터 현장실험 협의

□ 국내외 연구동향 조사

○ 고도정수처리가 빨리 도입된 유럽, 미국, 일본 등 국외는 물론 부산, 대구 등을 중심으로 정수센터 현장 및 파이롯 연구수행

○ 주요연구내용

- 활성탄여과지에서 생분해성 유기물질(BDOC, AOC) 제거특성

- 생물여과지의 오존분해산물 및 부산물 제거특성(Carboxilic acids, aldehydes 등)

- 활성탄여과지내 부착미생물량 및 미생물 군집분석

- 역세척이 유기물 제거 및 미생물에 미치는 영향

Ⅲ		연구내용

□ 활성탄여과지 역세척 최적화 방안

○ 계절별 활성탄여과지 역세척 주기결정 및 적정인자 선정

- 여과시간별 활성탄여과수의 수두, 탁도, 입자수, TOC, 세균수 등 비교

○ 적정 역세조건 및 운영방법 도출

- 수온별 역세조건별(공기, 물, 공기/물) 역세효과 비교

- 정수센터 여건에 맞는 초기탁도 누출제어방안 도출(시동방수, 휴지 등).

□ 미세입자 및 미생물 누출저감을 위한 활성탄여과지 운영방안

○ 활성탄여과수의 미세입자 및 미생물 누출특성 분석

- 계절별 여과지속시간에 따른 입자 크기별 분포 및 미생물 누출특성 분석

○ 역세척 조건별 역세전후 미세입자 및 미생물 제거효과 분석

□ 활성탄 여과지 생물학적 효율평가 및 적정수질지표 선정

○ 활성탄여과지 계절별, 운영기간별 미생물량과 AOC 제거율 비교

○ 활성탄여과지 생물학적분해 효율평가를 위한 AOC 대체 지표개발

- AOC 및 생분해성 오존분해산물(oxalate, acetate, aldehyde 등) 제거율 비교

□ 생분해성물질 최소화를 위한 고도정수처리 운영방안

○ 계절별 오존주입농도에 따른 AOC 변화 및 활성탄여과에 의한 제거율 분석

○ 활성탄여과지 운영기간에 따른 생물학적 제거효율 비교

Ⅳ		세부추진일정

내용	2015				2016
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
연구계획 수립 및 분석방법 setting
생물활성탄 여과지 역세척 최적화
미세입자 및 미생물 누출저감을 위한 활성탄여과지 운영방안
생물활성탄 여과지 생물학적효율 평가 및 적정 지표개발
생분해성 물질 최소화를 위한 오존/활성탄 운영방안
보고서 작성

Ⅴ		기 대 효 과

○ 정수센터 활성탄여과지 적정 운영관리 방안제시

○ 미세입자 및 미생물 누출저감을 통한 수질개선

붙임 : 신규과제 선정심의회 심의의견 및 조치계획 1부. 끝